문서번호	동물기획과-4210
결재일자	2014.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	동물기획과장	동물원장	서울대공원장
협 조
	관리부장
	총무과장
	조경과장
	동물복지과장
	주무관

- 백두산호랑이숲 전시물제작 -

준공기한 연기 검토 보고

서울대공원

(동물기획과)

- 백두산호랑이숲 전시물 제작 -

준공기한 연기 검토 보고

백두산호랑이숲 전시물 제작설치 공사와 관련하여 준공기한 연기 사유가 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

Ⅰ		사 업 개 요

○ 사 업 명 : 서울대공원 백두산호랑이숲 전시물 제작설치 공사

○ 계약 기간 : 2014. 3. 28 ～ 2014. 5. 29

○ 계약 금액 : 금147,000,000원

○ 사업 내용 : 전시물(설명패널, 체험물 등 전시시설 일체) 설치

○ 계약업체 : ㈜도둠디자인 대표 김명희

Ⅱ		사업기간 연장검토

1) 변경사유

- 호랑이숲에 전시되는 동물조형물, 전시설명패널, 그래픽 등 제작물의

완성도 향상을 위해 디자인 수정 및  조형물 설치 위치 재조정
등이 요구되어 공사기한 연장 필요

※ 관련보고 : 백두산호랑이숲 전시물 제작 중간보고회 결과 메모            보고(2014.5.20.), 검토 및 추가사항 메모 보고(2014. 5. 25)

2) 변경사항

- 계약기간 변경

구분	변경사항		비고
	당초	변경후
계약기간	2014.3.28.~2014.5.29	2014.3.28.~2014. 6.20	22일 연장

- 계약금액 : 변경없음.  끝.