문서번호	조경과-317
결재일자	2012.1.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	조경과장	관리부장		서울대공원장
협 조	동물원장
	시설과장
	동물기획과장
	동물복지과장
	주무관

백두산호랑이숲 조성사업 계획

서울대공원

(조경과)

백두산호랑이숲 조성사업 계획

노후된 호랑이사의 전시 및 관람환경을 개선하여 대한민국 대표동물원의 대표 동물로써 그 위상을 정립하고 이용객들에게 볼거리를 제공하고자 함

Ⅰ		사 업 개 요

사 업 명 : 백두산호랑이숲 조성사업

대 상 지 : 서울동물원 호랑이사 (부지면적 12,000㎡)

사업내용 : 폭포․계류 등 친환경 서식환경 재현, 관람쉘터, 수조설치 등

추진기간 : 2012. 12 ~ 2013. 10

총사업비 : 2,800백만원(2012년 1,000 / 2013년 1,800)

Ⅱ		현황 및 문제점

현    황

○ 시베리아 호랑이 : 24수(20수, 보육 2수, 포육장 2수)

○ 맹수사 시설현황 : 건축면적 404㎡, 외부방사장 2개소 1,387㎡, 철제우리 16개 1,430㎡

현실태 및 문제점

○ 동물원 개원 27년 경과로 호랑이사가 노후되고, 낡은 철책으로 보호되어 동물 생태를 저해하고 있는 등 고객 서비스 기대수준에 맞는 시설로 개선이 요구되고

○ 보유한 시베리아 호랑이를 전부를 전시할 수 없는 좁은 전시공간 및 원거리에서만 관람할 수 있는 관람환경

○ 용맹의 상징이자 우리 민족의 든든한 동반자 백두산 호랑이의 서식지를 재현하여 한국의 얼을 되살리고 명소화가 필요

Ⅲ		추 진 방 향

노후된 호랑이사를 동물특성을 고려한 친환경 동물사로 재조성

교육적 기능을 강화한 다양한 관람환경 조성으로 고객 만족도 향상

Ⅳ		추 진 계 획

추진방법

○ 설계용역 및 공사 : 제한경쟁입찰

사업내용 - 붙임 조성안 참조

○ 호랑이 움직임을 극대화한 호랑이 숲 조성

○ 물을 좋아하는 호랑이 특성을 고려 폭포 설치(겨울철에는 빙벽관람)

○ 유리창을 통하여 2층 ․ 측면 ․ 근접관람 등 다면 관람 유도

○ 단란한 호랑이 가족, 희귀한 백호 등 다양한 전시방법 도입 등

추진일정

○ 2012.  1.  6 : 실무협의회 구성

○ 2012.  1. 17 : 기술용역타당성심사 및 용역발주심의

○ 2012.  2. 10 : 기본 및 실시설계용역 발주

○ 2012.  2. 28. ~ 6 30 : 설계착수 및 시행

○ 2012. 6. 30 ~ 2013. 10 : 공사시행

소요예산

합 계	계	2012년	2013년	비 고
계	2,800,000	1,000,000	1,800,000
공 사 비	2,680,000	880,000	1,800,000
설계용역비	120,000	120,000	-

예산과목

○ 공원이용시민 만족도 향상, 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전, 백두산호랑이숲 조성, 시설비

Ⅴ		기 대 효 과

한국 멸종위기종 보전을 위한 환경부와 대공원간의 MOU체결에 따른 서식공간 확보를 통한 백두산호랑이 종보전 기관으로서 정체성 확인

동물 생태에 맞는 시설개선과 동․식물 관리 등 지속적인 고객 서비스 증진으로 세계적인 동물원으로 발돋움

붙임 : 1. 위치도 및 조성(안) 1부.

2. 현황사진 1부.   끝.