문서번호	토목부-6393
결재일자	2016.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장

법면하단 및 차도용 U형 측구 설치 변경 검토보고 (선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

2016. 4.

도시기반시설본부

(토 목 부)

법면하단 및 차도용 U형 측구 설치 변경 검토보고

(선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

산지측 법면 하단부 및 차도용 횡단 빗물받이용 U형측구는 현장타설로 되어 있으나, 경제성 등을 고려하여 기성제품으로 변경하고자 검토 보고드림

관련근거

○ U형측구 변경 실정보고 (선사고덕0420-70호, ‘16. 3.21.)

○ U형측구 변경 실정보고건 낙찰율 적용 검토(선사고덕0420-82호, ‘16. 3.31.)

공사개요

○ 위    치 : 강동구 암사동 440-1 ~ 고덕동 165-11(아리수로)

○ 사업규모 : 아리수로 도로확장 3.7km, 폭 2차로 → 4 ~ 6차로

○ 사업기간 : 2009. 1. 6. ~ 2016.12.31.

○ 총사업비 : 146,077백만원 (도급액 : 35,444백만원)

○ 시 공 사 : ㈜대저건설, ㈜청미건설

검 토

○ 산지측 깍기 비탈면 하단 및 차도용 횡단 빗물받이용 U형 측구는 현장타설로 설계되어있으나, 공정단계가 많고 콘크리트 양생기간, 시공성, 경제성 등을 고려하여 기성제품(관급자재)으로 변경이 필요함.

○ 추가로 설치가 요구되는 배드민턴장 진입로, 고덕산장 진입로 차도용 횡단빗물받이 뚜껑은 주택가측 소음민원이 예상되므로 주물형 무소음 그레이팅으로 변경이 필요함.

- U형측구 설치 계획

구 분			당초 (현장타설)	변경 (기성제품)	증‧감	비고
규격	Type-1	300×300 (보도용)	1,415m	1,415m	-	-
	Type-2	400×400 (보도용)	288m	288m	-	-
	Type-3	300×300 (차도용)	182m	257m	75	배드민턴장 진입로 (유입수 유도배수)
	Type-4	400×400 (차도용)	-	22m	22	배드민턴장 진입로 고덕산장 진입로 (차도 횡단구간으로 무소음그레이팅 적용)

○ 단가검토 : 낙찰가 적용(81.14%)

- 낙찰률 적용에 따른 공사비 비교

(단위:천원)

구분	단위	강제 협의율 (90.57%)	낙찰가 (81.14%)	증‧감	비고
도급비	1식	37,884	35,310	2,574
관급자재	1식	123,547	123,547	-
총공사비	1식	161,431	158,857	2,574

공사비 증·감

(단위:천원)

구 분	단위	당 초	변 경	증․감	비고
직접공사비	1식	77,600	24,304	53,296
제 경 비	1식	26,400	7,796	- 18,604
공사원가	1식	104,000	32,100	- 71,900
부가가치세	1식	10,400	3,210	- 7,190
도급공사비	1식	114,400	35,310	- 79,090
관급자재	1식	123,742	123,547	- 195
총공사비	1식	238,142	158,857	- 79,285

감리단 검토의견

○ 산지측 깍기 비탈면 하단에 설치되는 U형 측구는 현장타설로 설계되어있으나, 현장타설은 공정단계가 많고, 콘크리트 양생기간, 경제성, 공사기간 단축효과 등을 고려한 기성제품 설치로 변경하는 것이 타당하다고 판단됨.

○ 추가로 설치되는 배드민턴장 진입로, 고덕산장 진입로는 향후 주택가측 소음민원이 예상되므로 무소음 그레이팅을 설치하고자 함.

○ 자재수급 방법에 대하여는 공사비 절감을 위해 관급자재로 계획함.

※ 본 실정보고는 ‘공사계약 일반조건’ 제6절 공사 설계의 변경 4. 신기술 및 신공법에 의한 설계변경‘을 근거로 설계변경 하고자 하며, 실정보고 서류 검토결과 내역서, 수량산출서, 단가산출서, 도면 등이 설계도서 작성 제반기준에 맞게 작성됨.

조치계획

○ U형 측구 설치(현장타설 → 기성제품)에 대하여 감리단 검토의견과 같이 반영이 필요하며, 감액되는 공사비 79,285천원에 대하여는 설계변경자문회의(소위원회)심의 결과에 따라 반영하고자 함.

붙 임 : 감리단 검토의견서 1부.  끝.