921공구 기계설비공사중 법정 검사필증을 요하는

주요공사 잔여공정 추진계획

[2018.5. . 현재]

1. 승강설비 완성검사 추진계획

가. 엘리베이터 (24인승)

정거장	호 별	수량	완성검사 목표일	미 시공사항 완료 예정일자
				장비 반입	레일 설치	카조립	잠 설치	건축마감	전원공급	통신공사	개별 시운전	자동제어	점자 블럭	완성검사
935	1호기 (외부)	1
	2호기 (외부)	1
	3호기 (내부)	1
936	1호기 (외부)	1
	2호기 (내부)	1

나. 에스컬레이터 (1200형)

정거장	호 별	수량	완성검사 목표일	미 시공사항 완료 예정일자
				건축마감	핸드레일	측면 유리	전원공급	배면마감	개별 시운전	자동제어	점자 블럭	완성 검사
935	1호기 (#1번 출구 지상~B1대합실)	2
	2호기 (#2번 출구 지상~중층)	2
	2-1호기 (#2번 출구 중층~B1대합실)	2
	3호기 (#3번 출구 지상~중층)	2
	4호기 (#3번 출구 (중층~B1대합실)	2
	5호기 (B1대합실~ B2승강장)	2
936	1호기 (#3번 출구 지상~중층)	4
	2호기 (#3번 출구 중층~B1대합실)	4
	3호기 (B1대합실~ B3승강장)	2
	4호기 (B1대합실~ B2대합실)	2
	5호기 (B2대합실~ B3승강장)	2

2. 소방시설 완공검사 추진계획

추진내용		완료예정일자		비 고
		935	936
○ 잔여공사(Punch List 등) 마무리
	∙건축공사 : 천정공사, 방화문설치, 제연커튼설치, 방호구획 등
	∙전기공사 : 배선 및 기구부착, 화재수신반 프로 그램입력 등
	∙기계공사 : 옥내소화전 카바, S/P헤드 부착, 천정 디퓨져 설치, 소화기구 비치 등
○ 성능시험(소방감리) ∙종합정밀점검 작동시험 ∙체크리스트 사항 확인
○ 준공 서류 작성·제출(시공사) ∙시험성적서(펌프, TAB, 가스 등) ∙보고서, 준공도면 등
○ 준공 서류 검토(소방감리)
○ 완공검사 신청(감리⇒관할 소방서) ∙감리결과보고서 제출
○ 소방시설 완공검사 증명서 수령

3. 기타 준공필증 추진계획

○ 저수조 청소필증(수도법 제33조) :

○ 호이스트 안전인증서(산업안전보건법 제34조) :

○ 고압가스 안성검사(고압가스안전관리법 제16조) :