시설공사변경도급계약서
① 관리번호					② 계약번호			20160******** 06
③ 공 사 명	중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사
④ 현 장	서울시 노원구 하계동 학여울 청구아파트 ~ 월계동 월계역사
⑤ 계 약 금 액	전체		당초 : 금팔십억팔천사백이십삼만원 (금8,084,230,000원) 변경 : 금팔십팔억일천삼백이십팔만팔천원 (금8,813,288,000원) 증감 : 증)금칠억이천구백오만팔천원 (금729,058,000원)
	금차		당초 : 금삼십사억사천사백일십만팔천원 (금3,444,108,000원) 변경 : 금사십일억칠천삼백일십육만육천원 (금4,173,166,000원) 증감 : 증)금칠억이천구백오만팔천원 (금729,058,000원)
⑥ 추가계약 보 증 금	금 109,358,700원				⑦ 수요기관			서울특별시 도시기반시설본부
⑧ 변 경 전 준공기한	전체 : 2018. 11. 30.				⑨ 변 경 후 준공기한			전체 : 변경없음
	3차 : 2018. 11. 30.							3차 : 변경없음
⑩ 변경사유	가설벤트[상부공2개소,하부공1개소], 순성토∙사토 운반 및 가도변경, 투석방지망 변경, 목재데크 시공법 변경 외
위의 시설공사 변경계약을 체결함에 있어서 계약자는 공사입찰유의서, 공사입찰특별유의서, 공사계약일반조건, 공사계약특수조건, 청렴계약특수조건, 현장 설명사항 등은 물론 본계약에 규정되지 않은 사항에 대하여는 변경전 모든 계약서의 조건이 이 계약서의 일부가 되며, 공사에 필요한 노력을 경주하여 본 공사를 성실히 완수할 것을 확약하며, 계약의 증거로서 이 계약서를 작성한다.
도시철도공채매입필증		없 음				2018년 05월 일
계 약 자	⑪ 주 소			서울특별시 광진구 아차산로355, 405호
	⑫ 상 호			한양산업개발(주)			전화 번호		02-731-6000
	⑬ 대표자			이 기 욱 (인)			주민등록번호		*******1******
서울특별시 도시기반시설본부(분임)재무관

합 의 서
관리번호			계약번호	20160******** 05
건 명	중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사
현 장	당 초 : 서울시 노원구 하계동 학여울 청구아파트 ~ 월계동 월계역 입구 교차로 변 경 : 서울시 노원구 하계동 학여울 청구아파트 ~ 월계동 월계역사
당 회사는 귀본부와 계약체결한 상기 공사에 대하여 다음과 같이 공사계약변경에 합의하고, 계약자로서의 의무를 성실히 이행할 것을 확약합니다.
합 의 내 용 ○ 계약금액 ● 전 체 ● 3차 - 변경전 : 금8,084,230,000원 - 변경전 : 금3,444,108,000원 - 변경후 : 금8,813,288,000원 - 변경후 : 금4,173,166,000원 - 증․감 : 증)729,058,000원 = . - 증․감 : 증)729,058,000원 ○ 공사기간 ● 전 체 ● 3차 - 변경전 : 2016.04.29～2018.11.30 - 변경전 : 2018.01.22～2018.11.30 - 변경후 : 2016.04.29～2018.11.30 - 변경후 : 2018.01.22～2018.11.30
2018년 05월 일 주 소 : 서울특별시 광진구 아차산로355, 405호 회사명 : 한양산업개발(주) 대표자 : 이 기 욱 (인) 서울특별시도시기반시설본부장 귀하