				과 장		심사자		설계자			설 계	심 사		결 재
											2013년 12월 일	2013년 12월 일
변 경 설 계 서
	변경설계서 - 2014년 도로포장공사(2구역)
	구 분					당 초 금 액(원)				변 경 금 액(원)			비 고
	총 공 사 비					1,908,312,300				1,817,583,670			-90,728,630
	도급비		공 급 가 액			404,374,819				424,200,000			19,825,181
			부 가 가 치 세			40,437,481				42,420,000			1,982,519
			계			444,812,300				466,620,000			21,807,700
	관 급 비					1,450,252,730				1,337,716,400			-112,536,330
	이 전 비					13,247,270				13,247,270			0
○ 변경내용 : 절삭 및 덧씌우기 647a → 712.5a