「공릉 빗물펌프장 증설공사」변경 요청내역

① 관급자재_총액 – 1차 · 총차 계약기간 연장

계약번호	품 명	계약자	1차 계약금액 (총부기금액)	변경사항(계약기간)
				구분	당 초	변 경
12132197700	수중펌프	동해엔지니어링(주)	30,000,000원 (312,000,000)	1차	’13.08.23~ ’15.02.28	’13.08.23~ ’15.10.31
				총차	’13.08.23~ ’14.07.31	’13.08.23~ ’15.10.31
12132222800	천장크레인	㈜성진기계	15,000,000원 (51,902,400)	1차	’13.09.25~ ’15.02.28	’13.09.25~ ’15.10.31
				총차	’13.09.25~ ’14.07.31	’13.09.25~ ’15.10.31
12132249900	평면스크린	사회복지법인 대한장애인복지회	30,000,000원 (94,000,000)	1차	’13.10.22~ ’15.02.28	’13.10.22~ ’15.10.31
				총차	’13.10.22~ ’14.07.31	’13.10.22~ ’15.10.31
12131129700	가동보	㈜청수환경	25,800,000원 (131,607,520)	1차	’13.12.26~ ’15.02.28	’13.12.26~ ’15.10.31
				총차	’13.12.26~ ’15.07.31	’13.12.26~ ’15.10.31
12131035600	수문권양기	대양산업기계(주)	73,100,000원	-	’13.05.06~ ’15.02.28	’13.05.06~ ’15.10.31

② 관급자재_3자단가 - 계약기간 연장

요구번호	품 명	계약자	계약금액	변경사항(계약기간)
				당 초	변 경
12-13-1-49584-00	버터플라이밸브	㈜현대밸브	54,351,000원	’13.11.05~ ’15.02.28	’13.11.05~ ’15.10.31
12-13-1-49585-00	체크밸브	㈜현대밸브	92,130,000	’13.11.05~ ’15.02.28	’13.11.05~ ’15.10.31
12-13-1-49586-00	플랩밸브, 신축관이음	㈜현대밸브	49,516,000	’13.11.05~ ’15.02.28	’13.11.05~ ’15.10.31
12-13-2-68078-00	냉난방기	엘지전자(주)	11,052,500	’13.12.17~ ’15.02.28	’13.12.17~ ’15.11.30
12-13-2-68112-00	냉난방기	엘지전자(주)	2,122,000	’13.12.17~ ’15.02.28	’13.12.17~ ’15.11.30