주식회사  지디자인

수 신 자 : 서 울 대 공 원 장

(경   유)   조    경    과    장

제    목 : 「2013년 서울대공원 예방 사방공사」설계변경 실정 보고

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2013. 04. 22일자 계약 체결하여 시공중(2013.04.25-착공)인「2013년 서울대공원 예방 사방공사」설계변경 요인이 발생되어 아래와 같이 실정 보고 합니다.

-    아      래    -

가. 공    사    명 : 2013년 서울대공원 예방 사방공사

나. 공  사  기  간 : 2013. 04. 25 ~ 2013. 06. 13

다. 공  사  금  액 : ￦119,808,000

라. 설계 변경 요인 : 붙임참조

븉     임 : 설계변경 실정보고서 1부. 끝

주식회사  지디자인 대 표 김원율

담  당  한재경                         팀  장  한재경                           대표이사 김원율

협조자

시  행   지디자인 - 255                    (2013. 05.     )                  접수

우  518-700   경기도 용인시 기흥구 덕영대로 2077번길 47                / forest03@hanmail.net

전화 (031)202-5619  /  전송(031)202-5616  /  E-mail(forest5670@hanmail.net)  / 공개

실정보고서

<2013년 서울대공원 예방 사방공사>

(주) 지 디 자 인

실 정 보 고 서

1. 사업현황

가. 공 사 명：2013년 서울대공원 예방 사방공사

나. 위    치：경기도 과천시 일원(서울대공원내)

다. 공사개요

·1. 토공

① 터파기 963㎥

② 되메우기 110㎥

③ 지장목제거 1,737㎡

2. 구조물공

① 야면서골막이(상6.0 고1.2) 2개소

② 야면석골막이(상8.0 고1.2) 2개소

③ 야면석골막이(상10.0 고1.6) 3개소

④ 야면석골막이(상13.0 고1.2) 1개소

⑤ 야면석기슭막이 289.2㎡

⑥ 조경유용석 쌓기 34.5㎡

⑦ 야면석찰붙임 10㎡

⑧ 돌망태골막이(상7.2 고1.6) 1개소

⑨ 돌망태골막이(상8.55 고1.6) 1개소

⑩ 집수정(1.2*1.2*1.0) 3개소

⑪ 집수정(1.8*1.8*1.2) 1개소

⑫ 벤치플륨관(φ500) 26본

⑬ 배수관부설(φ600) 18m

⑭ 방부목횡단개거(L6.0) 3개소

⑮ 바이오콘식생수로(W1.0) 12m

3. 부대공

① 작업로개설(W2.5) 80m

② 지장목제거(5~8m) 180㎡

③ 능형망휀스(H1.2) 6경간

④ 병꽃나무식재(H1.2) 100주

⑤ 사철나무식재(H1.0) 180주

라. 사 업 비：119,808,000원

마. 사업기간：2013. 04. 25 ~ 2013. 06. 13

바. 설 계 자：백림산림기술사사무소

사. 시 공 자：주식회사 지디자인

아. 사업효과： 황폐산지의 비탈면을 안정시키고 비탈면을 식생으로 피복하여 황폐계류의 종횡침식 방지와 산각고정으로 집중호우 시 피해를 예방한다

2. 변경사유서(일반시방서 제27조  2호, 10호)

가.구조물공

① 야면석 기슭막이(2,3,4,5호지)

－ 야면석 기슭막이 기초를 야면석으로 시공하게 되어 있으나 집중호우시 빠른 유속으로 인한 기초 침식방지를 위한 콘크리트 기초를 보강하여 시공하고자 함.

② 야면석 기슭막이 추가

- 대공원내 토사유실로 인한 사면 붕괴지가 발생되어 기슭막이(H=2.0m)를 추가 설치하여 토사유실 방지, 비탈면 안정을 통한 조기녹화를 이루고자 함.

3. 주요 변경 사항

구 분	변 경 내 용	증(△)감 수량	비 고
구조물공	야면석기슭막이 기초 : 야면석198.0m) → 콘크리트(0.0m)	야면석석기슭막이기초: 콘크리트(198.0m)	2,3,4,5호지 기슭막이기초
	야면석 기슭막이(H=2.0m) : 0.0m → 80.0㎡(L=40.0m)	야면석 기슭막이 : 80.0㎡(L=40.0m)	6호지(추가공사지) 기슭막이
자재	레미콘(25-18-8) : 0.0㎡ → 24㎡	레미콘(25-18-8) : 24㎥ (0.6*0.2*198m)	2,3,4,5호지 기슭막이 기초용
	야면석(H=2.0m, 뒷길이60cm) : 0.0m → 82.0Ton	야면석( 뒷길이60cm) : 82Ton (2.0*40*0.55*0.7*2.65)	6호지(추가공사지) 기슭막이용
	레미콘(25-18-8) : 0.0㎥m → 16.0㎥	레미콘(25-18-8) : 16.0㎥ (0.2*80.0㎡)	6호지 기슭막이 뒷채움용

4. 변경 예상 소요 사업비 : 15,513,686원

가. 구조물공 - 9,312,256원

- 야면석 기슭막이 기초 레미콘타설 : 1,676,496원

- 야면석 기슭막이: 7,635,760원

나. 제  경  비 : 3,971,430원

나. 관급자재대 : 2,230,000원

위와 같이 현장여건의 반영이 이루어져 시공함이 타당하다고

사료 되어 보고 합니다.

2013.   05.

보 고 자 ： 시  공  자

주식회사 지디자인

대 표  김  원  율

서 울 대 공 원 장 귀하

사   진   대   지

야면석 기슭막이 추가지 (6호지) 전경사진

야면석 기슭막이 추가지 (6호지) 전경사진