팀장		10/14		심사자			설계자					설 계	2014.10.14.			공사감독2처-17128
												심 사	2014.10.14.			2014.10.14.
변 경 설 계 서(총차, 4회)
	공사명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사(총차)														(단위: 원)
	구 분				당 초			변 경						증 ․ 감
	공 사 비				11,691,500,000			11,691,500,000						-
	도급액		공급가액		4,801,122,727			5,037,377,727						증)236,255,000
			부 가 세		480,112,273			503,737,773						증)23,625,500
			계		5,281,235,000			5,541,115,500						증)259,880,500
	관급자재비				842,245,200			842,245,200						-
	이설비				5,568,019,800			5,308,139,300						감)259,880,500
	□ 공사개요
	○ 당 초 : - 공릉2빗물펌프장 신설 1식 ㆍ 펌프장 1식 ㆍ인입관거 부설 412m - 면목4동 배수관로설치 ㆍ 강관추진 : 1,500mm@2련, 52m										○ 변 경 : - 공릉2빗물펌프장 신설 1식 ㆍ 펌프장 1식 ㆍ인입관거 부설 412m - 면목4동 배수관로설치 ㆍ 강관추진 : 1,500mm@2련, 52m ㆍ 상수도관이설 : 1식