팀장		10/14		심사자			설계자					설 계	2014.10.14.			공사감독2처-17133
												심 사	2014.10.14.			2014.10.14.
변 경 설 계 서(2차, 3회)
	공사명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사(2차)														(단위: 원)
	구 분				당 초			변 경						증 ․ 감
	공 사 비				2,553,000,000			2,553,000,000						-
	도급액		공급가액		1,588,254,546			1,588,254,546						-
			부 가 세		158,825,454			158,825,454						-
			계		1,747,080,000			1,747,080,000						-
	관급자재비				652,899,000			652,899,000						-
	이 설 비				153,021,000			153,021,000						-
	□ 공사개요
	- 당 초 : ○ 공릉2빗물펌프장 ㆍ유입관로 PC박스 설치 : 273m ○ 면목4동 ㆍ강관압입(1,500mm) : 21m										- 변 경 : ○ 공릉2빗물펌프장 ㆍ유입관로 PC박스 설치 : 33m ○ 면목4동 ㆍ강관압입(1,500mm) : 21 ㆍ상수도이설 1식