<별첨1>

1단계 택시 운수종사자 자격관리시스템 개발 추진상황 보고

□ 각 기관별 시스템 운영현황

구분	시스템명	운영부서(기관)	운영내용	활용부서
서울시	운수사업 통합관리시스템	교통정보센터	-면허(허가)관리: 개인/법인사업자 -차량,차고지관리: 개인/법인차고지, 영업용차량 관리 -법규위반:위반단속,민원신고,행정 처분, 부과 등	25개 자치구 (교통행정과, 교통지도과) 택시면허팀
	서울택시 정보시스템	택시물류과 (한국스마트카드사 에서 지원)	-택시운행 정보 -운송수입금 정보 -차량위치 실시간 정보	택시정책팀
유관 기관	운수종사자 종합 정보시스템	교통안전공단 ※입․퇴사 정보 입력: 양 조합	-운수회사 정보 제공 -운전업무 종사 자격 미달자 정보 제공	택시면허팀 (한글,엑셀 파일/수동)
	택시운전자격 관리시스템	택시조합연합회 ※자격정보 입력: 양 조합	-택시운전 자격증 정보 제공	택시면허팀 (별도관리)

□ 구축개요

○ 구축기간 : ‘13. 4. 24 ~ ’13. 6. 30

○ 개발방법 : 운수사업관리시스템 재구축 사업에 포함 개발 중

○ 시스템 연계 개선구축(안)

- 연계대상 : 운수종사자정보시스템, 택시운전자격관리시스템, 서울택시정보시스템을 연계하여 운수사업관리시스템으로 통합 구축서비스

○ 시스템 구축방법

- 단계별로 구축 : 1단계(‘13. 6월말), 2단계(’14. 2월 예정)

- 구축방법 : 운수사업관리시스템 재구축 사업에 포함(교통정보센터 지원)

‣1단계 : 현 운수사업관리시스템의 개발환경에서 유관기관 필요DB 받아 구축

‣2단계 : 운수사업관리시스템의 개발환경 웹 전환 후, 시스템간 연계로 개선

- 자료제공 : 교통안전공단/택시운송사업조합은 서울시 요구자료 제공협조

- 서울택시정보시스템의 운전자 ID에 운전자자격번호 입력토록 보완 개발

‣개발변경 : 운전자ID입력자리수(4→9자리) 확장 운전자자격번호입력              → 운전자격번호 항목추가로 개발지원(KSCC에서 지원)

- 서울택시정보시스템과 택시운수종사자자격관리시스템간 연계 통해 효율적인 실제 탑승 운전자 관리 강화로 택시이용 시민의 안전한 택시운행 보장으로 택시이용 수요 증대에 기여(※ 시스템 연계방법 : 오프라인 연계)

□ 시스템 개발 추진경위

○ ‘13. 4. 10 : 1차 T/F 실무진 회의개최(시스템 연계 및 자료제공 협의)

○ ‘13. 4. 24 : 택시운수종사 자격관리시스템 연계 구축방안 추진계획

○ ‘13. 4. 26 : 2차 T/F 실무진 회의개최(유관기관 자료수집 TOPIS 전달)

○ ‘13. 5.  8 : 3차 T/F 실무진 회의개최(KSCC와 TOPIS간 연계 및 개발 공유)

○ ‘13. 5. 22 : 4차 T/F 실무진 회의개최(시스템 개발일정(’13.6월말 협의)

○ ‘13. 5. 30 : 5차 T/F 실무진 회의개최(시스템 개발상황 및 연계 재검토)

○ ‘13. 6.  4 : TOPIS망 연계방안 협의 실무진 및 개발자 회의개최

□ 1단계 시스템 구축 추진사항

○ 교통안전공단

- 1단계 택시 운수종사자자격관리시스템 구축을 위한 ‘운수종사자종합정보시스템(http://tsdms.ts2020.kr)’통해 필요한 DB정보제공

- 제공내용 :  입․퇴사 운수종사자 명단,취업운전자 현황(엑셀파일)제공

No	조합	업체명	성명	주민등록번호	구분	면허번호	차량 번호	입사일	퇴사일	경력	누적경력
1	서울 택시 조합	강화실업 (구유신교통)	공성호	*******1XXXXXX	퇴사	경기83-0255xx-xx		2013-01-01	2013-03-31	2개월 30일	16년 17일
2			김명수	*******1XXXXXX	퇴사	서울85-6097xx-xx		2011-11-01	2013-03-25	1년 4개월 24일	11년 1개월 25일

․입․퇴사 운수종사자 내역(1,823명)

No	조합	업체명	성명	주민등록번호	면허번호	차량번호	상태	현회사 입사일	현회사퇴사일	최초 입사일	경력	누계경력	신규 검사일
1	서울택시조합	㈜광일 통운	강경하	*******1XXXXXX	서울02-8116xx-xx		재입사	2013-01-14		2011-11-07	2월 29일	1년 4월 8일	2012-11-22

․취업운전자 현황(40,184명)

- 제공일시 : 2013. 4. 24(수)

○ 서울택시운송사업조합 ; 전국 택시운송조합 연합회로부터 받아 제공

- 1단계 택시운수종사자자격관리시스템 구축을 위한 ‘택시운전자자격정보시스템’의 필요한 DB정보를 엑셀형태로 담당자 메일로 제공

- 제공내용 : 택시운전자 자격증취득자 DB정보 중 성명, 주민번호, 운전자자격번호 등 3가지 항목의 자료를 제공

연번	성 명	주민등록번호	자격증번호
1	김 만종	*******×××××××	92 01 00001 (연도)(서울 )(일련번호)
2	김 재중	*******×××××××	920100002
・	・	・	・
447034	김 길태	*******×××××××	130102141

- 제공범위 : 1992년 ~2013년 15회분까지 제공

- 제공일시 : 2013. 4. 19(금)(약 40만명 자료)

○ 교통정보센터 : 운수종사자 자격관리시스템 별도 구축(중간보고)
- 초기자료(택시운행, 운전자 입․퇴사, 운전자격관리 등)DB변환 완료

(5.10) → 환경구성/DB테이블 추가 및 화면 구성(5.24) → 시스템         개발(6.7) → 단위 시험운영(6.14)→ 통합 시험운영(6.24) → 운전자         DB확인(6.28) → 시스템 운영(7.1)

- 운수사업관리시스템 서비스메뉴 화면

‣면허(허가)관리, 차고지관리, 교통위반관리, 택시운전자 관리

(※ 택시운전자관리 메뉴는 있으나, 현재 미사용 중)

○ 서울택시정보시스템의 운전자격번호 입력개발(중간보고:KSCC)

- 표준 프로토콜 정의서(택시운전자격번호, 영업일자, 누적승객탑승시간, 누적승객탑승시간, 차량등록번호, 사업자등록번호, 교통사업자명등) TOPIS 제공(5.3) → 시스템 개발(6.7) → 단위시험운영(6.14)→ 통합시험운영(6.23, TOPIS로 FTP로 화일전송) → 택시카드결제단말기에 시스템 배포(6.24)(※운전자가 택시 탑승시 운전자자격번호입력) → 시스템 운영(7.1)

- 서울택시정보시스템 서비스내용

‣수집일시, 교통 사업자명, 차량번호, 운전자ID, 승차시각, 하차시각, 주행 거리, 금액, 할증여부, 결제유형 등

수집일시	교통 사업자명	차량번호	운전자 ID	승차시각	하차시각	영업거리(km)	금액(원)	할증여부	결제유형 (카드/현금)
2012-11-01 03:43:06	경원기업	서울33아1031	9956	03:22.35	03:43.06	17853	17,400	할증	현금거래
2012-11-01 02:42:55	경원기업	서울33아1031	9956	02:16.12	02:42.55	23269	22,440	할증	신용카드거래

□ 1단계 시스템개발 공정율 : 90%(정상 추진 중)

○ 유관기관(교통안전공단 및 서울택시운송사업조합)으로부터 필요한 DB자료를 엑셀 형태로 받아, 교통정보센터의 운수사업관리시스템 개발업체에서 1단계 시스템 개발이 완료 중이며,

○ 또한 서울택시정보시스템의 ‘운전자 자격번호’에 대한 추가 개발이 KSCC에서 완료 중이며, ‘13. 6월 중 단위시험 및 시스템간 통합시험 후 카드결제기 단말기에 F/W 배포(서울시 협의후6.24) 통해 탑승 운전자 자격번호를 운수종사자 자격관리시스템과 자료 연계로 서비스 개시 예정

□ 향후계획

○ '13. 6.14  : 1단계 시스템 개발 중간보고 및 2단계 구축방안 협의

○ '13. 6.17~21  : 운전자 자격번호 입력 단위시험 운영 및 모니터링

○ '13. 6.24  : 운전자 자격번호 입력 위한 F/W배포(서울시협의)

○ '13. 7. 1 : 1단계 택시 운수종사자 자격관리시스템 서비스 개시예정