천호대로확장공사 좌측 보행자 통로박스 개통

천호대로(아차산역~광나루역) 병목구간 교통정체 해소를 위한 도로 확장공사 추진중 좌측 보행자통로박스 구조물공사가 완료됨에 따라 그간 통행불편을 겪은 주민과 함께 개통식 행사를 개최하여 소통,화합하는 계기를 마련코자 함.

Ⅰ		행사개요

일    시 : 2015. 9. 23(수) 16:00 ~ 17:00

장    소 : 천호대로 확장공사 현장시점(홍련봉 공원)

참석대상 : 시의원(문종철), 구의원(고양석), 광진구청장(김기동),

광장동 및 구의2동장, 광장중학교장 및 학부모, 그 외

지역주민 다수

Ⅱ		진행순서

□ 개 회 / 국민의례 ----------------------------	사회자(본부)
□ 내빈소개 -----------------------------------	사회자(본부)
□ 내빈대표 인사말씀 ---------------------------	문종철 시의원 등
□ 사업 취지 설명 ------------------------------	도시기반시설본부 교량건설과장
□ 천호대로(광나루역) 확장공사 개요 -------------	도시기반시설본부 교량건설과장
□ 좌측 보행자 통로 걷기 -----------------------	참석자 전원
□ 참석자 다과회 및 질의응답 -------------------	도시기반시설본부 교량건설과장
□ 폐 회 ----------------------------------	사 회 자

※ 첨 부 : 사업현황 1부. 끝.

천호대로(광나루역) 확장공사 사업현황

1		사업개요

◦  위    치 : 광진구 구의동 58-15 ～ 광장동 388-10 (아차산역～광나루역)

◦  규    모 : 폭 6 → 10차로, 연장 900m (지하차도 580m 포함)

◦  공사기간 : '07. 2. ~ '17.12.

◦ 총사업비 : 984억원 ('15년 예산 130억원, 기투자 500억원)

◦  시 공 사 : 대보건설 외 1

◦ 감 리 단 : ㈜수성엔지니어링

2		추진현황 경과보고

(공정률 :  58.0%)

◦ '10. 10.  : 공사계약 및 착공

◦ '11. 10.  : 매장문화재 발굴 완료

◦ '12. 03.  : 공사 1단계(우측) 완료

◦ '15. 06.  : 공사 2단계(좌측) 완료 및 3단계 교통전환

◦ '15. 09.  : 공사 3단계 교통전환

◦ '15. 09월 현재 : 중앙부 토공작업 실시

3		보행자통로박스 현황

◦ 연   장 : 총 580m(지하차도:260m, BOX형옹벽:320m)

◦ 규   모 : 폭 4.5m(보행자통로:폭2.5m, 자전거도로:폭2.0m)

◦ 주요시설물

구 분	규 모	주요기능	비 고
CCTV	4개	24시간 감시녹화 가능	고화질 돔형식 변경(2개소추가)
환기팬	14개	통로박스내 환기설비	대용량 설비로 변경(쾌적함 향상)
비상벨	10개	응급시 CCTV방향 전환	비상벨 울린곳으로 CCTV방향전환
조명등	201개	통로박스 조명	LED전등으로 밝기상향
강화유리	L=260m	차량매연, 소음 차단
보행자난간	L=580m	보행자와 자전거 충돌방지	보행자 안전강화(난간추가)
소화기	17개소	화재발생시 사용
충격흡수시설	2개소	자전거와 시설물 충격흡수	자전거 안전강화
종단구배		보행자 이동성 개선	구배4%->1.48%로 개선

4		향후계획

◦ '15.10. : 공사 3단계(중앙부) 토공완료 및 교통전환

◦ '15.12. : 공사 4단계(우측) 토공작업 완료

◦ '16.10. : 지하차도 상부 파형강판 시공

◦ '17.12. : 공사준공 예정

5		사진대지

□ 통로박스 전경

□ 전경사진