문서번호	토목부-12903
결재일자	2015.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장

보도블럭포장 형식 변경 등 검토보고

(남부순환로 개봉역앞 구조개선공사)

2015. 6.

도시기반시설본부

(토 목 부)

보도블럭포장 형식 변경등 검토 보고

- 남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사 -

‘서울시 보도공사 설계시공 매뉴얼ver1.0’ 및 유지관리부서(구로구),  보도포장과 관련한 민원 등을 반영하여 보도블럭 형식 등을 변경 하고, 이에 따른 비용을 반영하고자 검토 보고드림

관련근거

○ 「보도60년 관행에 마침표를 찍겠습니다」서울특별시장 방침 제134호
(도로관리과-7908호 2012. 5. 4.)

○ 보도블럭 변경요청 및 재협(구로구청 도로과-489호<2014. 1.13.> 및 도로과-7447호<2014. 6.17.> 및 도로과-14064호<2014.11.18.>)

○ 보도블럭 포장관련 민원사항 검토(도시기반시설본부-15-2751호<2015. 5.18.>)

공사개요

○ 위 치 : 구로구 개봉동234-1 ~ 198-1(개봉역 일대)

○ 규 모 : 지하차도 설치 폭4차로, 연장 736m

- 남·북측 측도설치 : 폭 2 ~ 3차로, 연장 2,280m

○ 사업기간 : 2007. 9. ~ 2015. 6.30.

○ 총사업비 : 668억원

○ 도 급 사 :(주)케이에스씨건설외 1사

보고내용

○ 유지관리부서(구로구 도로과) 요청사항 반영

① 보도포장 재료 변경 검토

- 소형고압블럭(U형-회색,적색) ⟹ 투수형 사각블럭(200x200x60)

② 보도 낮춤구간에 차량진입 방지를 위한 고탄성 볼라드 설치

③ 일부 보도면 보다 대지가 낮은 구간은 도로 경계측에 우수트렌치 설치

○ 서울시 보도공사 설계시공 매뉴얼 Ver1.0(서울시발행, 2013년 3월) 반영

④ 지하차도 BOX 상부 녹지부 보차도경계석 재료변경

- 급경사형 200*175+25*250*1000 미끄럼방지용, 모따기 라운딩R=10mm

※ 미끄럼방지 제외

⑤ 보도포장 설치기준(부록2 별첨)에  따라 보도 포장방법 변경

- 대상 : 빌라 및 상가지역 차량진출입 구간

⑥ 보도 공사중 교통안전시설물 설치 및 보행안전도우미 배치

○ 준공단계 교통전환(2015. 4.28.) 완료 후 유관기관 현장점검시 지적사항 반영

⑦ 개봉고가하부 광명방향 버스정류장(교통섬) 보행자 방호울타리 설치

⑧ 교통전환 초기 교통안내 모범운전자 배치

○ 주요 공종 수량 변경

공 종	규 격	수량 변경 현황			변경 사유
		전회	금 회	증·감
보도포장 (일반구간)	투수형: 200x200x60T	4,536㎡	3,438㎡	감)1,053㎡	- 차량진입부 I형블럭 포장 으로 변경
아스콘포장	PSMA	848㎡	-	감)848㎡	- 남측측도 포켓주차장 삭제
보도포장 (차량진출입부)	I형블럭 (200x100x80)	-	2,727㎡	증)2,727㎡	- 차량진입부 I형블럭 포장
보도 콘크리트포장	T=10cm	-	1,972㎡	증)1,972m2	- 민원구간 및 차량진출입부 보도시설지침 적용
보도 아스콘포장	#78, T=5cm	-	87㎡	증)87㎡	- 지하누수 민원구간 보도포장
부직포설치	2.0ton/m, 300g/㎡	4,536㎡	7,368㎡	증)2,832㎡	- 시설지침에 의한 2층포설 적용
안내간판설치	운전자용,보행자용,종합안내	-	38개	증)38개	- 시설지침 적용
가림막 설치	H = 1.0m	-	1,650m	증)1,650m	- 손율45% 적용(4개월사용)
라바콘 설치	H = 0.7m	-	423개	증)423개	- 손율45% 적용(4개월사용)
배수트렌치 설치	B=200mm 무소음그레이팅	-	164M	증)164m	- 구로구청 요청사항 반영 (남측측도 보도보다 낮은구간)
합판거푸집	L형측구	359㎡	-	감)359㎡	- 미시공분 삭제
도로경계석 기초		120	-	감)120m	- 보도공사장 점검 지적사항 반영
볼라드설치	Φ126x800mm	-	143개	증)143개	- 구로구청 요청사항 반영 (보도부 차량진입방지시설)
교통섬보행자용방호울타리	W=2000x H=1100 AL	-	36m	증)36m	- 개통후 합동점검시 요청사항
보행안전도우미			158인	증)158인	- 보도시설지침 적용
모범운전자	본선 교통전환시		18인	증)18인	- 서울지방경찰청 요구사항

자재비 단가 검토

○ 신규단가는 공사계약일반조건 제20조(설계변경으로인한 계약금액조정)

②항에 의거 설계가에 협의율(강제) 82.868%적용

(65.736%+ 100% / 2 = 82.868%)

- 보도블럭(2015. 3. 기준)

업체명		유한 콘크리트	이노블록	청원산업	태성 콘크리트	최저가 (적용가)	비고
조달단가	투수:200x200x60	26,818	28,636	35,818	27,272	26,818	부가세미포함
	불투수:200x100x80	26,636	28,727	23,364	23,636	23,364

- 볼라드 설치(2015. 3.기준)

업체명	신도산업(주)	우성안전(주)	(주)로드텍	금상이엔지	(주)세원리테크	최저가 (적용가)	비고
조달단가 (현장설치도)	140,000	169,091	202,727	245,455	286,364	140,000	부가세 미포함

- 공사중 교통안전시설 및 보행자도우미 배치 현황

품 목				규격	수량	비고
안내간판 설치	구입 + 설치		종합안내	1200x1800(일반)	4 EA
			운전자용	900x1800(전면반사)	2 EA
			보행자용	900x1800(일반)	8 EA
	이동설치		보행자용	900x1800(일반)	24 EA
가림막휀스 (4개월사용)	구입+설치			H=1.0m	243. m	손료:45%
	이동설치			H=1.0m	1,407 m
라바콘 (4개월사용)	구입+설치			H=0.7m	61 EA	손료:45%
	이동설치			H=0.7m	362 EA
소 계						12,030,309원
보행자안전도우미					158 인	13,873,190
교통신호수(모범운전자) 교통전환(완공단계))				3일(주간:4인, 야간:2인)	18인	3,260,000
소 계						17,133,190원
공사비(직공)		29,163,499원

공사비 증․감

(단위 : 원)

공 종	규 격	공 사 비			비고
		당초	변경	증·감
1. 보도포장		53,810,279	105,550,079	증)51,739,800
보도블럭 (일반구간)	당초:소형고압(U형:220x110x60) 변경:투수형사각블럭(200x200x60)	47,650,500	33,879,141	감)13,771,359
보도블럭 (차량진입부)	당초:- 변경:I형블럭(200x100x80T)	-	26,525,529	증)26,525,529
부직포설치	투수블록시공부(2t/m, 300g/㎡)		9,327,888	증)9,327,888
콘크리트포장	T=10cm	-	6,227,576	증)6,227,576
ASP포장	T=5cm		680,678	증)680,678
폴리아스방수			2,206,575	증)2,206,575
배수유공관설치	ϕ20mm(STS)		2,117,511	증)2,117,511
기존콘크리트깨기	T=30cm미만		805,756	증)805,756
삼각면목설치	L형측구(30x30)		1,247,795	증)1,247,795
볼라드설치	Φ126x800mm(매립식)		16,590,145	증)16,590,145
보행자용방호울타리설치	[W=2000xH=1100알루미늄]		4,529,088	증)4,529,088
선형/점자	198x98x60 300x300x60	6,159,779	1,412,397	감)4,747,382
2. 교통안전시설 설치			12,030,309	증)12,030,309
안내간판설치	운전자용/보행자용/종합안내		1,640,020	증)1,640,020
가림막설치	H=1.0m(4개월사용:손료45%)		10,084,524	증)10,084,524
라바콘설치	H=0.7m(4개월사용:손료45%)		305,765	증)305,765

공종	규 격	공 사 비			비고
		당초	변경	증·감
3, 배수트렌치 설치			32,827,982	증)32,827,982
트렌치설치	B=200(측구형수로관+압연강판뚜껑)		22,441,432	증)22,441,432
배수관부설접합	흄관 Φ300mm		3,057,076	증)3,057,076
코아천공	Φ400mm(T=30cm이상)		3,852,522	증)3,852,522
우수받이설치	PC(300x400)		3,476,952	증)3,476,952
3. 운반공	(자재비)	38,804,676	191,352,173	증)152,547,497
소형고압블럭	U형220x110x60	18,100,603	-	감)18,100,603
투수형블럭	(200x200x60)		83,602,926	증)83,602,926
I형블럭	(200x100x80)		56,998,784	증)56,998,784
점자/선형블럭	220x110x60 300x300x60(고강도세라믹)	8,954,565	16,564,164	증)7,609,599
보조기층			14,917,243	증)14,917,243
레미콘	25-21-8		9,409,212	증)9,409,212
모래		3,033,990	2,439,090	감)594,900
보차도경계석	당초:(급경사형:미끄럼방지용) 변경:(급경사형:일반형)	8,715,518	6,732,424	감)1,983,094
아스콘	#78		688,330	증)688,330
직접공사비		92,614,955	341,760,543	증)249,145,588
제경비		14,485,045	45,846,267	증)31,361,222
보행안전도우미			13,873,190	증)13,873,190
교통신호수 (모범운전자)	교통전환(완공단계) 시행 (3일간 배치)		3,260,000	증)3,260,000
공급가액		107,100,000	404,740,000	증)297,640,000
부가세		10,710,000	40,474,000	증)29,764,000
도급공사비		117,810,000	445,214,000	증)327,404,000
폐기물처리비			1,595,000	증)1,595,000
총 공사비		117,810,000	446,809,000	증)328,999,000

감리단 검토 의견

○ 보도 유지관리부서(구로구 도로과) 요청사항과 「서울시 보도공사 설계시공 매뉴얼 Ver1.0(서울시발행, 2013년 3월)」에 의한 재료변경, 준공단계 교통전환(2015.4.28) 완료 후 유관기관 현장점검시 지적사항 반영 및 개봉동 407-15외 2필지 지하층 누수 민원사항 반영은 타당하다고 판단되며

○ 증액되는 공사비에 대하여는 본부 승인 후 설계변경 심의위원회 심의 상정하여 결과에 따라 추후 설계변경에 반영하고자 함.

조치계획

○ 감리단 의견과 같이 유지관리부서의 보도블럭 형식변경, 민원사항 등 실정보고에 대하여 유지관리부서 의견 반영 및 민원해소를 위하여 승인하고 증액되는 공사비(328,999천원)에 대하여 추후 설계변경소위원 심의 결과에 따라 반영하고자 함.

붙 임  : 감리 검토의견서 1부.  끝.