2015. 10. 5.~11.30

이 보도자료를 2015 10월 5부터 보도하여 주시기 바랍니다.

보도자료

담당부서 :

도시안전본부 교량안전과

교량안전과장

이 용 심

2133-1940

특수교량팀장

이 수 근

2133-1951

사진없음 ▣

사진있음 □

쪽수 : 3 쪽

담당자

임 동 운

2133-1952

제 목 : 동작대교 포장공사에 따른 교통통제

서울시에서는 오는 10월 5일부터 11월 30일까지 동작대교 포장공사를 시행하기 위하여 동작대교 용산구 서빙고동↔동작구 이수교차로 양방향 구간에 대하여 3개차로중 1개차로를 주,야간(24시간) 교통통제를 실시하오니 시민 여러분의 이해와 협조를 부탁드립니다.

□ 교통 통제계획

통 제 일 시	통 제 구 간	통 제 내 용	비 고
2015. 10. 05(월) 22:00시～ 2015. 11.30(월)	동작대교 본선구간 상,하행선 3개차로중 1개차로씩 교통통제	동작대교 본선구간 용산구 서빙고동↔ 동작구 이수교차로 상,하행선 양방향 3개차로중 1개차로 주,야간 24시간 교통통제	<시공사> (주)케이에스씨건설 (☎*************) 조영구

※ 기상상황 및 작업여건에 따라 교통통제일이 변경 될 수 있습니다.

□ 시민 협조사항

2015년 10월 5일 22:00시부터 2015년 11월 30일까지 동작대교 포장공사를 시행하기 위하여 동작대교 용산구 서빙고동↔동작구 이수교차로 양방향 구간에 대하여 3개차로중 1개차로를 주,야간(24시간) 교통통제를 실시하오니, 동작대교를 이용하시는 운전자께서는 공사 구간 내 서행 및 안전운전을 당부 드리며 공사기간중 실시간 교통정보를 확인하시고 가급적 혼잡구간을 피하거나 우회도로를 이용하여 주시기 협조 부탁드립니다.

동작대교 포장공사 위치도

공사구간

동작대교 동작구

이수교차로 방향

3개차로중

1개차로 전면통제

공사구간

동작대교 용산구

서빙고방향

3개차로중

1개차로 전면통제

1	동작대교 포장공사

□ 단계별 포장 작업계획

□ 위    치 : 서울특별시 동작구 동작동 ~ 용산구 이촌동(동작대교)

□ 규    모 : 차도폭 11.8m, 연장 960m(상,하행선)

□ 공사기간 : 2015. 10. 5 ~ 2015. 11. 30(57일간)

구 분	작 업 내 용
1단계 상,하행선 3차선	◎ 10/5 ~ 10/20 1개차선 통제
2단계 상,하행선 2차선	◎ 10/16 ~ 11/05 1개차선 통제
3단계 상,하행선 1차선	◎ 11/06 ~ 11/20 1개차선 통제
기 타	기상상황 및 작업여건에 따라 일정 조정시 11/30까지 순연

◆ 동작대교 단계별 포장계획 일정

구분	공 법	위 치 및 표장계획	비 고
포장공	GUSS+PSMA 포장	본교 상,하류 각각 폭 11.8m, 연장 960m

구분	위 치	공 사 기 간	비 고
1단계	본교(상‧하류측)3차선	10/05 ~ 10/20
2단계	본교(상‧하류측)2차선	10/21 ~ 11/05
3단계	본교(상‧하류측)1차선	11/06 ~ 11/20