보완 요청 사항

연 번	내 용	비 고
1	1) 대방지하차도 연결통로 상부 통과 시 조치(하부보강)과 Box 구조 검토서의 내용과 상이하므로 이에 대한 확인 필요 [p20] 2) Box구조검토 시 도로설계편람의 활하중과 중량물 차량하중을 비교 하여 검토하였으나, 축간거리 등에 따른 하중재하 상태를 고려하여 추가 검토 요망 - 콘크리트 강도 등 현 구조물 상태를 고려한 구조검토 3) 운행구간 중 주차가 많고 도로가 협소한 구간에 대한 통행대책 및 호송차량 계획 보완 요망 4) 운행구간 중 공중선로(케이블 등)에 대해서도 사전에 해당 시설물 관리자 사전협의 등 대책 보완	도로 시설과
2	1) 경유지상 도림고가, 대방지하차도, 노들남·북고가 등의 경우 시설물 하부 및 옹벽부 옆을 통과하는 것으로 확인되는 바, 시설물 손상이 발생되지 않도록 주의할 것 2) 수송작업중 필히 교통신호수 배치 및 안전보호책 강구 3) 경유지상 중분대 철거가 불가피한 경우 시설물 원상복구계획서 제출 4) 수송작업중 시설물 손상이 발생할 경우 즉시 사업소 담당자에게 연락 및 원상복구계획서 제출 등	남부도로 사업소 (시설 보수과)
3	※ 철거대상 중앙분리대 제원 : DS가드레일(매립형 지주) + 차광망 1) 철거시 유의사항 - 중앙분리대 철거 기간 최소화(운송일 당일 또는 전일철거) - 차광망의 뒤틀림, 파손발생 방지를 위해 차광망 해체 후 중앙 분리대 철거 - 중앙분리대 철거 후 복구까지 안전사고 발생이 없도록 안전시설물 설치 철저 2) 원상복구시 유의사항 - 운송완료 후 즉시 복구 - 지주매입깊이 준수 및 연결부 접합 철저 - 도로선형에 맞게 원상복구 3) 기타 - 철거대상 시설물 중앙분리대 철거 및 복구 계획서 제출 후 공사 시행 - 철거 및 복구시 우리 공단 담당 확인 후 시공(담당 천성찬, 2290-6368) - 교통불편 최소화를 위해 교통처리계획서에 의한 공사 안내표지, 안전시설물 설치 및 신호수 배치 철저	서울시 시설관리공단
4	1) 제한차량 운행(중량물 수송) 행위는 서울메트로 시설물이「시설물 안전관리에 관한 특별법」제2조2호 및 3호에 규정된 1, 2종 시설물로서 국토교통부 「철도보호지구안에서의 행위제한에 관한 업무처리지침(고시 제2013-327호)」에 의거하여 시행하는 것을 원칙으로 하여야 함 2) 운행 전 기 협의된 내용이 변경될 경우에는 반드시 재협의를 거친 후에 운행을 하여야 함 3) 지하철 안전운행에 피해가 발생하지 않도록 중량물 수송을 하여야 하며, 관찰을 통하여 지하철 구조물 손상 등의 피해가 예상되거나 발생한 경우에는 즉시 운행을 중지하고 허가기관과 서울메트로 제1토목관리소에 연락과 함께 신속한 안전조치를 하여야 함 4) 지하철 구조물 손상 시에는 건설공사 안전관리 지침[국토교통부 고시 제2013-50호]에 의거 정밀안전진단 전문기관에게 지하철 구조물 손상 등의 피해에 대한 원인분석과 대책수립을 의뢰하여 얻은 결과물에 대한 타당성을 분석 및 검증을 통해 서울메트로가 제시하는 방안으로 보강공사 등을 시행아여야 함 5) 지하철 구조물에 대해 안전성․내구성․사용성 등이 심각하게 저해될 경우에는 일체의 손해바생(운수 수입 등의 영업 손실․재산 피해 등)을 하여야 하며, 시설물 피해 복구기간 동안 우리공사 기술직원의 출동․입회에 따른 인건비를 부담하여야 함 6) 지하철 시설물은 「시설물 안전관리에 관한 특별법」에 의거 관리하는 시설물이므로 서울메트로 직원 입회에 따른 업무(기술)지원비를 부담하여야 함 7) 중량물 수송 최소 7일전에는 「서울메트로 담당자」에게 운행계획을 통보하여야 함 ※ 서울메트로 담당자 연락처 : 제1토목관리소(02-6110-6973, 6953)	서울 메트로
5	1) 우리공사와의 협의조건 및 제출된 협의도서를 준수하여 신청자 책임하에 안전운행(지하철 상부통과 시 서행준수 등) 이루어질 수 있도록 처리 2) 도시철도 5호선 통과일정 등 상세 운행일정 통보 및 우리공사와 협의된 사항 외의 변경사항(운행일정, 통과위치, 통과하중 변경 등)이 발생할 경우에는 우리공사와 충분한 사전협의 후 시행될 수 있도록 처리	서울도시철도공사
6	1) 차량소통에 지장이 없는 야간 취약시간대 통행가능 2) 교통통제시 자체 신호수 및 모범운전자 배치하여 교통관리 실시	동작 경찰서 (교통과)
7	1) 노들길 중앙분리대 철거 후, 영등포로57길 역주행 교통 통제대책 구체적 마련 2) 여의교 횡단 및 중앙분리대 철거 관련 교통 통제대책 구체적 마련 3) 영등포교차로 역주행 및 교통 우회 대책 마련 4) 홍익상가사거리 좌회전 청과시장사거리 구간 복개 및 교량 설치 여부 확인 5) 교통통제에 따른 홍보 대책 등을 마련 후, 재협의 요청하시기 바람	영등포 경찰서 (교통과)