업무연락전

작 성 자

이한규

작성일자

2015-02-12

문서번호

도시기반시설본부-15-900

대상현장

[선사로~고덕지구간 도로확장공사](주)한국건설관리공사, 주식회사 대저건설

제    목

보조감리원(기계) 투입기간 조정 요청에 대한 승인 알림

내    용

1. 선사고덕0420-77(2015. 2.11.)호와 관련임.

2. “선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사외 1개소 통합전면책임감리용역”수행과 관련하여 오수중계펌프장 이설 및 상수도관(D=700㎜) 이설 감리감독 업무 수행을 위해 기간조정 승인요청 사항에 대하여 아래와 같이 승인하오니 감리업무 수행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

- 아  래

담당업무	성 명	투입기간		비고
		당 초	조 정(안)
펌프장이설 및 상수도관 이설 용접감리(기계분야)	김 시 찬 (감리사보)	‘14.11.20. ~ ‘15.2.20. (3개월)	‘14.11.20.~ ‘15.6.20. (7개월)	전체감리비 증액 없음

.  끝.

붙임 :

서울특별시