2015년 작은도서관 조성사업 보조금 교부신청서

1. 사업개요

ㅇ 지자체명 : 서울특별시 성동구

ㅇ 조성공간 : 사근동주민센터 지하1층

ㅇ 주    소 : (133-817) 서울특별시 성동구 사근동길 37

ㅇ 도서관명 : 사근동어린이놀이터작은도서관 (가칭)

ㅇ 사업유형 : 생활밀착형

ㅇ 사업기간 : 2015 년 1월 ～ 2015 년 12월

ㅇ 규    모 : 108.86㎡(32.98평)

ㅇ 운영주체 : 지자체 직영

ㅇ 특    징 : 동 청사 신축 예정으로, 주민들의 문화인프라 욕구를 반영

현재 작은도서관 면적 51.8㎡을 108.86㎡로 증가

2. 조성 후 운영계획

ㅇ 조성 이후 지자체의 운영예산 지원계획

(단위: 천원)

연도	2015	2016	2017	2018	2019	계
예산	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000

ㅇ 운영 및 활동계획

- 운영인력 : 총 19명

(담당 공무원 1명, 공공근로 1명, 순회사서 1명, 자원봉사자 15명)

- 운영시간 : 월요일 ~ 금요일 9:00 ~ 18:00

- 비치도서‧물자: 장서 4,600여 권 비치(성인 및 어린이 도서), 책장(大): 10개, 책장(小): 2개, 어린이용 책상: 1개, 어린이용 의자: 5개, 일반 책상: 4개, 일반 의자: 9개, 일자형 스툴 1개, 컴퓨터 3대, 에어콘 1대

- 운영프로그램 : 독서마라톤, 저소득층 어린이 공부방, 구민독서경진대회, 알뜰도서교환전, 한 도서관 한 책 읽기, 인문학 프로젝트, 독서 지도 등

- 주민참여 촉진을 위한 홍보전략 등 : 전자행정서비스 , 구 소식지·홈페이지, SNS 등

성동구에서 최초 추진하는 사업으로, 전자행정서비스 신청 구민에게 각종 고지서,안내서 및 구에서 추진하는 행정사항 등을 전자메일과 핸드폰으로 알림하는 서비스

3. 예산계획

ㅇ 총괄표

(단위 : 천원)

계	국비	지방비		기타	비고
		시도비	시군구비
254,922	70,000		184,922		지방비 예산확보 (동청사건립기금)

ㅇ 집행계획(지방비 포함 총 사업비 집행계획)

(단위 : 천원)

구 분	금 액	산 출 내 역	비고
공사비	250,922	공사비용 - 면적(108.86㎡) × 2,305,000원= 250,922,300원 - 국비: 70,000천 원 - 구비: 180,922천 원 ※산출근거: “2013년 서울시 공사비 가이드라인” 기준 공사비 단가: 면적(㎡)당 2,305천 원
기타 운영비	4,000	도서구매, 프로그램운영, 인력지원 등
계	254,922

ㅇ 2015년도에 추진할 세부 내용(사업별)에 대한 사업비 집행계획 작성

ㅇ 자본지출 경비로 집행하되, 지방비의 경우도 자본지출 경비로 예산편성․집행

ㅇ 보조금 조정으로 신청액과 지원액이 다른 경우 또는 당초 사업신청서

상의 집행계획을 변경할 경우 <변경 전 집행계획>과 <변경 후 집행계획>을

동 서식으로 각각 기재하며,

ㅇ 변경사항이 없는 경우 당초 사업신청서상의 <집행계획>을 그대로 기재

4. 사업추진일정

추진일정	주요 내용	비고
15. 1월 ~ 2월	사업비 교부 신청 및 공사 발주
15. 2월	주민자치운영위원회 구성 및 운영
15. 3월 ~ 12월	착공 및 조성 공사
16. 1월 ~ 2월	조성 공사 정산 및 결과보고
16. 1월 ~ 6월	내부 인테리어	지자체 부담
16. 7월	준공 및 이전 운영

5. 작성자

ㅇ기관명 : 성동구청         소속 : 문화체육과

ㅇ담당자 : 직급 : 행정7급   성명 : 강국화

ㅇ연락처 : 전화 02-2286-5194  팩스  02-2286-5905  이메일 kiku@sd.go.kr