보조금 교부 신청서

사 업 명	독산3동 청소년독서실 기능전환(꿈꾸는 푸른 등대)
사업목적	청소년독서실을 기능전환하여 지역 청년과 청소년들이 활용할 수 있는 공간 조성
사업내용	- 대 상 : 독산3동 청소년독서실(서울 금천구 시흥대로138길 10-11) - 기 간 : 2016. 4. 25. ~ 8. 31. - 규 모 : 지하 1층, 지상 3층, 연면적 354.96㎡ - 내 용 : 리모델링을 통한 회의실, 상담실, 세미나실, 커뮤니티 공간 조성
신 청 자	주 소	서울특별시 금천구 시흥대로73길 70
	기 관 명	금천구청			전화번호		2627-2852
	대표자명	차 성 수
교부신청금액	일금일억오천만원 (￦150,000,000원)
총사업비 (단위 : 천원)	150,000천원
입금계좌	은행명:우리은행 / 계좌번호:1601-10600-025-6(금천구청 보조금 일반회계)
사업개요	세부사업		사업비(총액)	사업기간		사용방법
	리모델링 설계용역		8,000,000원	‘`16.4.25~5.20		수의계약
	리모델링 공사		110,000,000원	‘`16.5.21~8.19		공개입찰
	리모델링 감리용역		2,000,000원	‘`16.5.21~8.19		수의계약
	가구 및 사무용품 구입		30,000,000원	‘`16.8.20~8.31		수의계약
2016년 서울시주민참여예산 관련 독산3동 청소년독서실 기능전환사업 보조금 교부를 신청합니다. 2016. 4. . 위 신청인 금천구청장 (인) 서울특별시장 귀하
붙 임 : 사업추진계획서 1부

사 업 계 획 서

1. 사 업 명

: 독산3동 청소년독서실 기능전환(꿈꾸는 푸른 등대)

2. 사업목적 및 필요성

: 이용률이 낮은 기존 독서실의 기능을 일부 전환하여 지역 청년과 청소년이 긍정적

만남을 가질 수 있는 공간을 제공함으로써 청소년의 건전한 성장을 도모하고 지역에      대한 애향심을 높임

3. 사업 개요

○ 사업기간 : 2016년 4월 ~ 8월

○ 사업장소 : 금천구립 독산3동 청소년독서실

○ 사업주관 : 금천구청 교육지원과

○ 소요예산 : 150,000천원

4. 교부신청액 및 산출기초

(단위 : 천원)

구 분	계	산출내역	비고
계	150,000
리모델링 설계용역	8,000	8,000,000원*1명=8,000,000원
리모델링 공사용역	110,000	110,000,000원*1식=100,000,000원
리모델링 감리용역	2,000	2,000,000원*1명=2,000,000원
가구구입비	24,000	의자, 책상 등 구입비 24,000,000원
사무용물품 구입비	6,000	복사용지, 화장실 용품 등 구입비 6,000,000원

5. 세부추진계획

- 청소년독서실 기능전환을 위한 리모델링 설계

- 리모델링을 통한 회의실, 상담실, 세미나실, 커뮤니티 공간 조성

- 집기 및 책상, 의자 등 구매

6. 추진일정

- 2016년 4월 ~ 5월 : 리모델링 설계

- 2016년 5월 ~ 8월 : 공사 실시

- 2016년 8월 : 공사 완료 및 집기 등 구매

7. 기대효과

○ 지역 청년활동가와 청소년과의 연계 사업을 통한 건전한 사회 안전망 구축

○ 지역 청소년이 성장해 지역을 위해 활동할 수 있는 공간 조성으로 긍정적이고

지속적인 선순환 체계의 기반 마련