보조금 교부 신청서

사 업 명	강북구 게이트볼장 기반시설 조성 (번2동 주공5단지 게이트볼장 지붕씌우기)
사업목적	게이트볼장 지붕씌우기를 통한 전천후 운동공간 조성
사업내용	구조안전검토 및 설계용역, 게이트볼장 막구조물 설치
신 청 자	주 소	(우편번호 : 142 -701) 서울특별시 강북구 도봉로89길 13(수유동)
	기 관 명	강북구청		전화번호		02)901-6222
	대표자명	강북구청장 : 박겸수
교부신청금액	일금 이억오천만원 (￦ 250,000,000)
총사업비 (단위 : 천원)	250,000천원
입금계좌	은행명 : 우리은행 계좌번호 : 1601-10600-024-5
사업개요	세부사업		사업비(총액)		사업기간		사용방법
	게이트볼장 지붕 씌우기		250,000천원		2015.4~11.		용역 및 공사 발주 물품구매
	이		하 여		백
서울특별시 보조금 관리조례 제13조의 규정에 의하여 위와 같이 신청합니다. 2015년 3 월 일 서 울 특 별 시 장 귀하
붙 임 :‘15년도 생활체육시설 확충사업 추진계획서 1부

【서식 1】

2015년도 생활체육시설 확충사업 추진계획서

1. 사 업 명 : 강북구 게이트볼장 기반시설 조성 (번2동 주공5단지 게이트볼장 지붕씌우기)

2. 사업금액 : 250,000,000원

3. 위    치 : 서울시 강북구 오현로31길 141(번2동 주공5단지)

4. 사업추진현황 및 계획

(2015. 3. 10. 현재기준)

사전 행정절차	기본설계	실시설계	부지확보	최초착공	사업진도	준 공
기술용역 타당성 심사 완료 2015년 3월 5일	-	’15년 4월 발주 예정	한국토지주택공사와 사용협의	‘15년9월 예정	-	‘15년11월 예정

5. 사업내용(운동장 등 개별 시설의 경우)

부지면적	시설면적	경기장규격	시설내용	관 중 석	주요 부대시설
730㎡ 단지내 게이트볼장 부지면적임	730㎡	28m×26m	막구조물 등	㎡ 석 ( 명)

6. 연도별 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	‘15년 이전			‘15년 이후				비 고
		소계	’14까지	‘15	계	‘16	‘17	‘18이후
합 계		250		250
① 시설사업비	250	250		250
- 국 고
- 지방비
․시 비	250	250		250
․구 비
② 부지매입비

7. 공정별 투자현황 및 계획(시설 건립비)

(단위 : 백만원)

공 종 별	총사업비	투 자 실 적		투 자 계 획		비 고
		2013까지	2014	2015	2016이후
계	250			250
①설계비	20			20
②감리비
③시설부대비
④도급공사비
- 토목공사	22			22
- 건축공사	208			208
- 전기공사
- 기계설비공사
- 조경공사
- 통신공사
- 폐기물처리
⑤관급공사비

8. 부지확보 현황

(단위 : ㎡, 백만원)

구 분	확 보 대 상		확 보 실 적		확 보 계 획		비 고 (완료시기 등)
	면 적	소요액	면 적	소요액	면 적	소요액
계
무상확보
유상확보

※ 해당 시설 예정부지는 한국토지주택공사에서 소유 및 관리중인 임대아파트내 게이트볼장으로, 부지내 막구조물 등 설치에 대한 업무협의를 완료함

첨부 : 사진 각 1매(시설부지 사진, 조감도)

시설부지(현장) 사진

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

조  감  도

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서번호	문화체육과-2385			★주무관		체육시설관리팀장	문화체육과장		행정관리국장		부구청장		구청장
결재일자	2015.01.28.
보존기간	5년
				협 조
공개여부	비공개(5)
보도여부
		번2동 주공5단지 게이트볼장 지붕씌우기 추진 계획
2015.01.26.
강 북 구 (문화체육과)

- 번2동 주공5단지 -

게이트볼장 지붕씌우기 추진 계획

2015년 서울시 예산에 주공5단지 게이트볼장 시설 개선 사업비가 반영 됨에 따라, 날씨에 상관없이 효율적으로 사용할 수 있도록 야외 게이트볼장에 지붕씌우기를 추진하고자 함

Ⅰ		게이트볼장 현황

위    치 : 서울시 강북구 오현로31길 141(번2동 주공5단지)

시설현황 : 부지면적 728㎡(28m × 26m)

- 게이트볼장 1개소, 컨테이너(사무실) 1동, 관람의자 등

이용현황

- 한국토지주택공사에서 관리하는 주공5단지 내 운동시설(야외 게이트볼장)로써 2014.11월 연합회장배 게이트볼 대회가 개최된 바 있으며, 우천시 등 날씨에 따라 이용이 제한적임

Ⅱ		사업 개요

기    간 : 2015.2. ~ 2015.11.

규    모

- 막구조물 설치 650㎡ (26m × 24m)

- 휀스(연장 108m, 높이 2.0m) 재설치, 비가림 차양 설치, 기초공사 등

사 업 비 : 250백만원(서울시 보조금)

내    용 : 전천후 게이트볼장 조성을 위한 지붕씌우기(막구조물 설치)

※ 한국토지주택공사 서울지역본부 임대자산관리부-6751(2014.09.05)

▶ 시설물 설치 가능 회신(지하저수조 영향 없도록 검토 요청)

Ⅲ		문 제 점

사업대상지 하부에 저수조 위치

○ 시설물의 소유 및 관리주체인 한국토지주택공사 협의 결과 게이트볼장 하부에 지하저수조가 위치하여, 상부에 막구조물 설치시 구조적 안전 우려되며 향후 공사비 증가요인 발생 가능성 있음

Ⅳ		추진 대책

하부저수조에 대한 구조검토 및 실시설계 용역

○ 주공5단지 내 게이트볼장 하부저수조는 1991.5.13 사용승인된 시설물로, 상부에 막구조물(지붕씌우기) 시공가능 여부 및 보완방안 검토를 위해 구조검토 및 실시설계를 병행하고자 함

○ 구조검토 및 실시설계 용역

- 과업내용 : 구조물 안전 검토, 문제점 도출시 보완방안(설계) 제시, 실시설계

- 용 역 비 : 20백만원

- 용역기간 : 2015.05. ~ 06.(2개월간)

- 사업의 적기 시행 및 구조물의 적정 검토를 위해, 구조검토(안전진단) 실적이 우수한 업체를 대상으로 수의계약 체결하고자 함

기존 단지내 시설을 활용하여 전천후 게이트볼장 조성

○ 인접구(노원구, 도봉구, 성북구)에는 전천후 이용이 가능한 게이트볼장이 조성되어 있어 우리구 게이트볼 동호인들이 상대적 박탈감을 겪고 있으나, 우리구 여건상 접근성이 좋은 위치에 부지확보가 어려워 기존게이트볼장 운영 활성화가 필요한 실정으로,

○ 주공5단지 내 게이트볼장에 지붕씌우기 공사를 시행하여, 강북구 게이트볼 활성화에 기여하고자 함

조달우수제품(막구조물) 구매·설치

○ 구조검토를 위해서는 상부 막구조물에 대한 설계안이 작성되어야 하므로, 업무협조 및 품질확보를 위해 조달우수업체 제품으로 구매하고자 함

-  조달우수제품 등록 업체(2개) : (주)타이가, 주식회사 에이맥스

-  구매 방법 : 조달우수제품 중 경제성, 디자인 등 검토하여 직접 구매

※ 조달우수제품은 조달청 성능인증을 거쳐 품질이 보증되고 계약법령에 따라 수의계약이 가능

Ⅴ		향후 일정

○ 2015. 1.     : 사업계획서 제출(문화체육과→서울시)

○ 2015. 2.~ 4. : 기초조사 및 업무협의, 용역 발주

○ 2015. 5.~ 6. : 구조검토 및 실시설계 용역 시행

○ 2015. 7.~ 8. : 행위허가 및 공사 발주

○ 2015. 9.     : 공사 착공

○ 2015.11.     : 공사 완료 및 시설물 인수·인계

붙임 1. 위치도 및 현황사진

2. 시공 사례(노원구, 도봉구 성북구).

3. 한국토지주택공사 회신문.  끝.