보조금 신청서

사  업  명

자전거 교통안전체험장 시설 보수

사업개요

○ 사업목적 : 자전거 안전 교육 시설 환경 개선을 통한 교육의 생활화 및 접근성 개선

○ 사업내용 : 교통안전체험장 노후 시설 보수

○ 사업기간 : 2017.1.~12.

○ 사업비 내역

사 업 명	재 원 조 달 계 획(천원)
	계	국비	시비	구비	기타(민간)
계	106,273		63,764	42,509

신청인

기 관 명

ㅇㅇ구청

대표자명

ㅇㅇㅇ

전화번호

ㅇㅇㅇㅇ-ㅇㅇㅇㅇ

주    소

서울시 ㅇㅇ구 ㅇㅇㅇ로 ㅇㅇㅇ

교부신청액(원)

63,764,000원

은 행 명

ㅇㅇ은행

계좌번호

ㅇㅇㅇㅇ-ㅇㅇㅇㅇㅇ-ㅇㅇㅇ-ㅇ

서울특별시보조금관리조례 제20조의 규정에 의하여 위와 같이 보조금을

교부 신청합니다.

2017. ○.

○○구청장(인)

붙  임 : 사업계획서 1부.  끝.

사 업 계 획 서

1. 사업명 : 교통안전체험장 시설 보수

2. 사업목적 및 필요성

○ 자전거 안전 교육 시설 환경 개선을 통한 교육의 생활화 및 접근성 개선

○ 자전거 교통안전체험장 노후 시설 보수를 통한 안전 사고 예방

○ 자전거 안전 문화 조성과 자전거 이용 활성화를 위한 인프라 개선

3. 사업개요

○ 사업기간 : 2017.1.~12.

○ 사 업 비 : 106,273천원(시비 63,764천원, 구비 42,509천원)

○ 사업내용 : 자전거 교통안전체험장 시설 보수

4. 예산운영계획

○ 예산확보방안 : 시비보조사업, 보조금 이외 경비 부담 현황 등

- 지방보조금 등으로 충당되는 부분 이외의 경비를 부담하는 자의 성명, 부담하는 금액 및 방법 등

○ 예산집행계획

분기별	예상 집행액(천원)				내 역
	계	시비	구비	기타
합계	106,273	63,764	42,509
1/4분기		31,882	21,255		내부 포장
2/4분기		31,882	21,254		안전 휀스
3/4분기
4/4분기

5. 사업추진계획

○ 노후된 자전거 운전 코스 내부 포장 공사

○ 노후된 안전 휀스 보수 작업

6. 지방교부금 산출내역(용역비 산출내역)

(단위 : 천원)

구 분	내 용	금 액
내부 포장	재료비
	인건비
	부가세
	소 계	53,137
안전 휀스 보수	재료비
	인건비
	부가세
	소 계	53,136
총 계		106,273

7. 추진일정

○ 용역 발주	:         2017.3.2.

○ 공     사	:   2017.3.6.~3.24.

○ 정산 보고	:     2017.4.23.한

8. 향후계획

○ 자전거 안전 교육 프로그램 계발 및 운영	:       2017.4.~11.

○ 도색 공사	:           2018.2.

9. 기대효과

○ 자전거 교통안전체험장 노후 시설 보수를 통한 교육생 안전 확보

○ 증가하는 자전거 안전 교육 수요에 부응하는 매력있는 자전거 안전 교육 인프라 구축

○ 자전거 안전 교육 환경 조성 및 자전거 이용 활성화

10. 기   타 : 사업수행에 따른 수입금에 관한 사항 등