				★ ◎
문서번호	기전사업부-4219			부 원			기전사업부장				마곡위례사업처장
보존기간	5년											11/29
				이종윤			정기철				남시명
결재일자	2021.11.29
공개여부	공개			협조	파트장			오성근
일상감사	대상아님
보조제목을 입력하는곳 입니다
위례 택지조성공사(3공구) 수질정화시설 설계변경 심사위원회 개최(안)
		서울주택도시공사
(마곡위례사업처 기전사업부)

서울 위례지구 택지개발사업 단지조성공사(3공구)

설계변경 심사위원회 개최 보고

「서울 위례지구 택지개발사업 단지조성공사(3공구)」의 수질정화시설과 관련하여 설계변경 심사·의결대상이 발생된 바, 다음과 같이 설계변경 심사위원회를 개최하고자 합니다.

Ⅰ.				관련 근거

설계변경심사위원회 운영기준(2021.04.28.)

기전사업부-4136(2019.10.21.) 「지시부(전동버터플라이밸브 사급자재 전환 변경 적용 검토」

서울위례 제 2021-277호(2021.09.28.) 「장지천 수질정화시설 펌프인양호이스트 및 난간설치 관련 현황보고」

서울위례 제 2021-287호(2021.10.06.) 「실정보고(수질정화시설 설계보완 및 현장여건 반영」

기전사업부-4116(2021.11.23.) 「설계변경 관련 기술심사 요청(위례 택지 수질정화시설)」

견적발주부-5805(2021.11. 25.) 「기술심사 결과 회신(위례 택지 수질정화시설)」

Ⅱ.				계약 현황

(단위 : 원)

계 약 명	계 약 자	계 약 금 액	계 약 기 간	비 고
서울 위례지구 택지개발사업 단지조성공사(3공구)	㈜동양건설산업	90,989,878,000 (기계 102,267,000)	2015.12.07~ 2022.01.10

Ⅲ.				심사위원회 개최

안    건: 위례 택지 수질정화시설 관련 설계변경 적정성 심의

의결방법: 서면결의(코로나-19로 인한 사회적 거리두기)

개최일시: 2021. 11.

심사위원회 구성

구 분	소 속	직 위	성 명	비 고
위 원 장	도시공간사업본부 마곡위례사업처	처 장	남 시 명
부위원장	건설사업본부 건축설계처 기전설계부	부 장	박 우 석
위 원	건설사업본부 건축설계처 기전설계부	차 장	최 정 훈
위 원	건설사업본부 건설사업처 견적발주부	대 리	민 중 훈
위 원	건설사업본부 에너지기술사업처 기계사업부	파트장	이 성 주
위 원	기획조정실 재정관리부	파트장	이 준 철
위 원	기획조정실 예산자금부	파트장	홍 은 수

Ⅳ.				심의·의결대상

전동버터플라이밸브 설치 건(지급자재 → 사급자재 변경)

전동호이스트 설치 건(기존 체인블럭 삭제 후 전동호이스트 설치)

안전난간 설치

기술심사 결과[견적발주부-5805(2021.11.25.)]

품 명	심사결과	기술심사 적용 금액 증·감	비고
펌프 인양용 호이스트	현재 신규단가 1식 견적사항을 전문가격조사기관,표준품셈 등에 따라 재산출 반영 검토	(감)7,211,000	원 단위 절사
안전난간 설치	기존 잡철물제작설치(간단) → 용접식난간 설치 적용 검토	(감)674,000

□ 계약 업체와 협의 후 신규비목은 협의률(85.355%)을 곱한 단가 적용

Ⅴ.				공사비 증감 현황

계약금액 변경 현황                                                      (단위 : 원)

구 분	계약금액 변경			비고
	변경 전	변경 후	증·감
서울 위례지구 택지개발사업 단지조성공사(3공구)	90,989,878,000 (기계 102,267,000)	90,999,305,000 (기계 111,694,000)	(증)9,427,000

Ⅵ.				행정사항

상기 안건에 대한 설계변경 심사위원회 개최

붙임  1. 부의안, 설계변경 심사위원회위원 선정, 위원회소집통보, 제안사유서 1부

2. 실정보고(수질정화시설 설계보완 및 현장여건 반영_기계)_기술심사 반영 1부

3. 기술심사 결과 회신(위례 택지 수질정화시설) 1부

4. 기술심사 조치결과 1부.  끝.