	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	계약기간 변경(고덕강일공공주택지구 문화재시굴 및 표본조사용역)

1. 국방문화재연구원 국문연 제2017-076(2017.11.08.)호와 관련입니다.

2. 고덕강일 공공주택지구 문화재 시굴 및 표본조사용역에 대한 계약기간을 아래와 같이 연장코져 보고합니다.

가. 용 역 명 : 고덕강일공공주택지구 문화재 시굴 및 표본조사용역

나. 계약기간

구 분	기 정	변 경	증 감
계약기간	2016.11.21. ~ 2017.11.20	2016.11.21. ~ 2018.06.28	증) 220일

다. 계 약 자 : 재단법인 국방문화재연구원

라. 도 급 비 : 553,450,000원 (변경없음)

마. 연장사유 : 문화재 조사지역 토지보상(지장물철거) 지연에 따른 조사기간 부족

바. 지체상금 : 미부과

사. 귀책사유 : 우리공사

붙임  계약기간연장요청(국방문화재연구원).  끝.

파트장						택지조성부장				택지조성처장	전결	11/09
		송치정						박영욱			박광균
협조자
일 상 감 사	기술감사부장		백경희				감사일자 :	2017/11/09		감사일련번호: No.	1043		감사의견여부 :	의견없음

시행			택지조성부-5605				(2017.11.09)			접수				()
방침번호
우	063336			서울특별시 강남구 개포로 621								/	www.i-sh.co.kr
전화		3410-7640			전송	3410-7621		/	cjsong@i-sh.co.kr					/	공개