				★ ◎										연구원장 방침 제285호
문서번호	연구실-3530			연구원			연구실장				SH도시연구원장
보존기간	10년											11/30
				강지연			김형근				천현숙
결재일자	2020.11.30
공개여부	공개			협조
일상감사	대상아님
보조제목을 입력하는곳 입니다
공사기간 연장 검토 보고(방학동 604-7번지 필로티 내진보강사업 시범공사)
		서울주택도시공사
(SH도시연구원)

「방학동 604-7번지 필로티 내진보강사업 시범공사」

공사기간 연장 검토 보고

「방학동 604-7번지 필로티 내진보강사업 시범공사」와 관련, 감리자 검토의견 반영 및 동절기 공사 등의 사유로 아래와 같이 공사기간을 연장하여 추진하고자 검토ㆍ보고함.

1. 공사현황

○ 공사명 : 방학동 604-7번지 필로티 내진보강사업 시범공사

○ 공사기간 : 2020.11.19. ~ 2020.12.02

○ 도급액 : 이천일백육십칠만원(￦21,670,000)

○ 시공사 : 한국내진시스템(주)

2. 관련규정 및 근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 공사계약일반조건 제8절2 「계약기간의 연장」

○ 기술감리 아이스트 검토의견 송부(IST-2020-122, 2020.11.30.) “2020 필로티구조물의 내진보강설계 및 기술감리용역의 시범시공 대상단지 내진보강공사 준공기한 연기원 검토결과 제출건”

○ 시공사 한국내진시스템주식회사(20*******1, 2020.11.27), “방학동 604-7번지 내진보강사업 시범공사 공사 연장 요청의 건”

3. 공사연장 사유

○ 착공신고 승인지연으로 착공지연 : 당초 착공일(2020.11.19.)에서 5일 지연 (2020.11.24. 착공)

○ 동절기 온도하강으로 인한 미장용 몰탈마감 양생지연 : 양생시간 최소 3~4일로 소요되나, 온도하강으로 최소 8일이 필요함에 따라 약 4일 지연

4. 검토의견

○ 시공사에서 요청한 공사기간 연장(9일)은 보강공사 일정 및 현장여건을 고려해 볼 때, 타당하다고 판단됨.

5. 계약변경내용

○ 공사기간 변경

구분	공사기간
	착공일	준공일
당초	2020.11.19	2020.12.02
변경	2020.11.19	2020.12.11

○ 계약금액 조정 : 없음

6. 행정사항

○ 상기 변경내용으로 계약부에 통보하여 계약변경 요청

붙임  1. 아이스트_2020필로티구조물의 내진보강설계 및 기술감리용역의 시범시공 대상단지 내진보강공사 준공기한 연기원 검토결과 제출건 1부

2. 연기원 1부

3. 합의서 1부

4. 예정공정표(당초) 1부

5. 예정공정표(변경) 1부.  끝.