				★ ◎
문서번호	기계사업부-4421			부 원			파트장				기계사업부장			에너지기술사업처장
보존기간	30년																12/28
				이상모			이성주				공가			허원
결재일자	2020.12.28
공개여부	부분공개(5,6)			협조	부 원			윤성수		부 원			황재성
일상감사	대상아님
세곡2지구 도시형생활주택 소방공사 및 책임감리용역
준공기한 연기 검토보고 및 변경계약 시행(안)
		서울주택도시공사
(건설사업본부 기계사업부)

준공기한 연기 검토보고 및 변경계약 시행(안)

(세곡2지구 도시형생활주택 소방공사 외 1건 관련)

우리공사에서 시행중인「세곡2지구 도시형생활주택 소방공사」및 「세곡2지구 도시형생활주택 소방공사 책임감리용역」관련 선행공종의 공기연장에 따라 본 계약 건의 준공기한 연기 및 변경계약을 다음과 같이 시행코자 합니다.

1				관련근거

❍ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 제8절 2(계약기간의 연장)

❍ 공사계약특수조건 제13조(계약기간 연장)

❍ 토목조경공사부-609(20.02.12.)「실착공 지연 보고」(본부장 방침 제44호)

❍ 건축공사부-5392(20.12.01)「공사기간 연장 검토 보고(세곡2지구 도시형생활주택 건설공사)」(본부장 방침 제434호)

❍ 기계사업부-4195(20.12.08)「준공기한 변경검토 지시」

❍ 리더스신화********0「준공기한 변경 검토 보고의 건」

❍ 세움 제2020-12-11호「세곡2지구 도시형생활주택 소방공사 준공기한 변경 검토 보고」

2				계약현황

(단위: 원)

연 번	계약명	계약자	계약금액	계약기간
1	세곡2지구 도시형생활주택 소방공사	㈜리더스신화	295,080,620	20.03.06 ~ 21.02.22
2	세곡2지구 도시형생활주택 소방공사 책임감리용역	㈜세움이앤씨 건축사사무소	15,675,000	20.06.08 ~ 21.06.14

※ 실착공일자 : 2020.05.28

3				변경내용

❍ 준공기한 연기 사유

- 세곡2지구 도시형생활주택 건설공사 공기 연장에 따른 순연

❍ 기간 및 금액 변경사항

연 번	계약명	당 초	변 경	증 감	비 고
1	세곡2지구 도시형생활주택 소방공사	20.03.06. ~21.02.22.	20.03.06~ 21.07.30	증) 158일	금액변경 없음
2	세곡2지구 도시형생활주택 소방공사 책임감리용역	20.06.08. ~21.06.14.	20.06.08~ 21.07.30	증) 46일	금액변경 없음

※ 기간연장에 따른 계약금액 변경없음(붙임 합의서 참조)

4				검토의견

❍ 제반사유(붙임1 참조)에 의한 선행공정(건축, 토목)의 공기연장에 따라 소방공사 및 감리용역의 준공기한 연장은 적정함

❍ 본 기한연장은 계약상대자의 책임없는 사유에 해당하므로 지체상금 미부과

5				행정사항

❍ 관련부서 협조 결재

- 본 공사의 대상공종(기계, 전기)에 따라 전기사업부 협조

❍ 상기 변경사항 관련하여 계약부에 계약변경요청

붙임  1. 공사기간 연장 검토 보고 (세곡2지구 도시형생활주택 건설공사) 1부

2. 세곡2지구 소방공사 수정공정표(기계, 전기) 1부

3. 계약변경 합의서 1부.  끝.