				★ ◎
문서번호	토목조경공사부-464			부 원			파트장				토목조경공사부장			건설사업처장 직무대행
보존기간	1년																02/03
				정혜경			오형준				최봉석			조진래
결재일자	2021.02.03
공개여부	부분공개(5)			협조
일상감사	대상아님
강빛 초.중 통합학교 신축공사
설계변경 검토 보고[강빛초.중통합학교(조경)]
		서울주택도시공사
(건설사업본부 토목조경공사부)

설계변경(안) 검토 보고

	「강빛 초.중 통합학교 신축공사」 조경 공종과 관련하여, 준공자문위원회 및 저영향개발자문 의견 반영에 대한 설계변경(안)을 다음과 같이 검토·보고합니다.
		6

Ⅰ		공사개요

구 분	내 용
공 사 명	강빛 초.중 통합학교 신축공사
조경면적	4,428.66㎡
공사기간	2019.10.08. ~ 2021.02.07.
도급금액	26,102,346,000원(조경 : 737,261,085원)
시공사	주식회사 풍산건설
감리자	㈜토문엔지니어링건축사사무소

Ⅱ		관련근거

토목조경설계부-1875(2019.10.31.)

「강빛 초.중통합학교 신축공사 설계도서 송부」

토문 제 2021–040(2021.01.21.)

「조경공사 실정보고서 제출의 건」

Ⅲ		변경내용

준공자문위원회 및 저영향개발자문 의견 반영

- 텃밭 주변 평의자(농기구 보관함) 설치, 안내판 1개소 설치, 앉음벽 물량 감

- 잔디수로 및 자갈집수정 신설

- 기타 포장 물량 변경

Ⅳ		금액검토

설계변경 세부사항                                                          (단위 : 원)

구분	내용	증감 금액(원)	비고
1	식재공사	102,363
2	시설물공사	1,146,323
3	포장공사	157,443
4	우배수공사	1,788,497
직접공사비		3,194,626
간접공사비		784,072
도급비		3,978,698

계약금액 조정 : 증 3,978,698원                                             (단위 : 원)

구분	당초	변경	증감
강빛 초.중 통합학교 신축공사(조경)	737,261,085	741,239,783	증) 3,978,698

단가적용 : 신규비목 낙찰률 적용

- 신규 비목에 대한 기술심사 완료[견적발주부-503호(2021.01.27.)]

Ⅴ		행정사항

상기 검토(안)에 따라 실정보고를 승인하고, 추후 계약변경 시 반영

붙임  1. 변경내역서(강빛초.중) 1부

2. 「강빛 초·중통합학교 신축공사」설계도서 송부 1부

3. 기술심사 검토결과 통보[강빛초,중 통합학교 신축공사] 1부

4. 실정보고(별첨) 1부.  끝.