				★ ◎
문서번호	기반시설부-954			부 원			부원			기반시설부장			도시조성부장
보존기간	30년												대결		05/06
				서영훈			권오종			노병철			명경선
결재일자	2022.05.06
공개여부	공개			협조
일상감사	대상아님
동부간선도로(좌안) 진출램프교 정밀안전진단용역
준공기한 연기 검토
		서울주택도시공사
( 도시공간조성처 기반시설부 )

동부간선도로(좌안) 진출램프교 정밀안전진단용역 준공기한 연기 보고

우리공사에서 동남권유통단지기반시설공사(2차)의 일환으로 시행한 동부간선도로(좌안) 진출램프교에 대한 정밀안전진단용역과 관련, ‘서울특별시 건설기술심의 소위원회’ 일정에 소요되는 기간을 추가 반영하여 준공기한을 연기코자함

Ⅰ		용역 개요

용 역 명 : 동부간선도로(좌안) 진출램프교 정밀안전진단용역

용역기간 : 2021.08.02.~2022.05.08.

용 역 사 : 라온구조안전기술㈜

도 급 비 : 102,853천원

Ⅱ		준공기한 연기

사유

○ 제87차 서울특별시 건설기술심의소위원회 개최 통보[기술심사담당관 –22191(2022.04.26.)]

- (05.20. 예정)

○ 건설기술심의 소위원회 일정에 따라 심의의견 보완/반영 기간 소요 예상

용역기간 변경

구분	착수일	준공일	비고
당초	2021.08.02.	2022.05.08.
변경	2021.08.02.	2022.06.30.	증)54일

○ 지연배상금 : 미부과(계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 지체)

Ⅳ		행정사항

본 방침을 계약부서에 통보하여 변경계약 체결

붙임  계약자 준공기한 연기요청 공문(별첨) 1부.  끝.