						★ ◎
문서번호		양천주거안심종합센터-4053				부원					파트장				양천주거안심종합센터장				서남센터운영처장
보존기간		10년																				04/25
						권영수					임종범				김명철				최광락
결재일자		2023.04.25.
공개여부		부분공개(5)				협조
일상감사		대상아님
통제	없음
	황남신
보조제목을 입력하는곳 입니다
준공정산보고[양천영등포센터-2 임대아파트 시설물 유지보수공사]
				서울주택도시공사
(서남센터운영처 양천주거안심종합센터)

준 공 정 산 보 고

(양천영등포센터-2 임대아파트 시설물 유지보수공사)

양천주거안심종합센터에서 시행한『양천영등포센터-2 임대아파트 시설물 유지보수공사에 대하여 아래와 같이 정산 후 준공 처리하고자 합니다.

1		관련근거

가. 도아 제2023-03-16(준공계 제출의 건, 2023.03.31.]

나. 정산대상

정산대상	관 련 근 거	비고
산업안전보건관리비 (실비정산)	- 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 (고용노동부 고시 제2022-43호, 2022.06.02.)제8조(사용금액의 감액·반환 등) ㆍ발주자는 도급인이 법제72조제2항에 위반하여 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않는 안전관리비에 대하여 이를 계약금액 에서 감액조정하거나 반환을 요구할 수 있다.
산재보험료 (요율정산)	-고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료 징수 등에 관한 법률 제14조 제3항 및 동법 시행령 제13조 보험료율의 결정 -(국토교통부)사회보험의 보험료 적용기준(국토교통부고시 제2021-905호,2021.06.22.) - 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준(2023. 1. 2.)
고용보험료 (요율정산)	-고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료 징수등에 관한 법률 시행령 제12조 고용보험료율 -조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준(2023. 1. 2.)
국민건강보험료 노인장기요양보험료 국민연금보험료 퇴직공제부금 하도급대금지급 보증서 발급수수료 건설기계대여금 지급보증수수료 환경보전비 (실비정산)	지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제8절 보험료 사후정산 등 계약담당자는 계약대가의 지급청구를 받은 때에는 하도급계약을 포함하여 해당 계약 전체에 대한 보험료 납부여부를 최종 확인하여야 한다.입찰공고 등에 명시된 국민건강보험료 등의 범위(법정보험료율 인상 시에는 변경계약을 체결한 후의 금액을 말한다) 안에서 정산해야 하며, 실제 납입금액이 해당 비목의 보험료를 초과하더라도 증액 정산은 할 수 없다.

2		계약현황

가. 계약현황

공사명	계약자	계약일	계약기간	계약금액(원)
양천영등포센터-2 임대아파트 시설물 유지보수공사	도아기업(주)	2021.03.29.	2021.04.01. ~ 2023.03.31.	3,776,141,000

3		준공금액

가. 준공금액                                                        (단위:원)

공사명	계약금액	준공금액	정산금액(증감)	비고
양천영등포센터-2 임대아파트 시설물 유지보수공사	3,771,141,000	3,651,518,000	감)124,623,000

4		준공정산내역

가. 준공정산 세부내역                                               (단위:원)

정산항목	계약금액	준공금액	정산금액(증․감)	비고
재료비	864,761,110	1,022,258,574	증)157,497,464	내역물량증
직접노무비	1,509,018,471	1,532,605,502	증)23,587,031	내역물량증
간접노무비	116,194,419	118,010,571	증)1,816,152	요율에 따른 정산
직접경비	10,801,229	18,774,847	증)7,973,618	내역물량증
산재보험료	60,132,874	61,072,738	증)939,864	요율에 따른 정산
산업안전보건 관리비	51,796,136	4,950,000	감)46,846,136	실비정산
고용보험료	14,139,350	14,360,299	증)220,949	요율에 따른 정산
국민건강보험료	54,243,601	6,204,210	감)48,039,391	실비정산
노인장기요양보험료	6,248,857	749,720	감)5,449,137	실비정산
국민연금보험료	71,165,075	5,400,000	감)65,765,075	실비정산
하도급대금 지급보증서 발급수수료	1,931,508	-	감)1,931,508	실비정산
건설기계대여금지급보증수수료	7,630,656	383,050	감)7,247,606	실비정산
환경보전비	7,153,740	-	감)7,153,740	실비정산
퇴직공제부금비	36,373,260	13,942,500	감)22,430,760	실비정산
기타경비	174,298,177	187,101,167	증)12,802,990	요율에 따른 정산
일반관리비	122,421,425	122,418,280	감)3,145	요율에 따른 정산
이 윤	227,364,782	211,330,407	감)16,034,375	요율에 따른 정산
고용개선지원비	97,180,786	-	감)97,180,786	실비정산
부가가치세	343,285,544	331,956,136	감)11,329,408	요율에 따른 정산
합 계	3,776,141,000	3,651,518,000	감)124,623,000

5		행정사항

- 상기 정산내용과 같이 정산 후 준공처리하고자 함.

붙임  1. 양천영등포센터-2 임대아파트 시설물 유지보수공사 (기성6회)준공정산 1부

2. 산재고용완납증명원 1부

3. 산업안전보건관리비사용관련서류(기술지도) 1부

4. 국민건강보험료,노인장기요양보험료,국민연금보험료 납부관련서류 1부

5. 공제부금납부확인서 1부

6. 건설기계대여금지급보증수수료 1부

7. 폐기물처리관련서류 1부

8. 준공정산합의서 1부.  끝.