업무연락전
작 성 자	이한규	작성일자	2014-11-28	문서번호	도시기반시설본부-14-46073
대상현장	[선사로~고덕지구간 도로확장공사](주)한국건설관리공사, 주식회사 대저건설
제 목	볼라드 수량변경 실정보고 승인 알림
내 용
1. 선사고덕0420-587(2014.10.6.)호 및 토목부-23510(2014.11.28.)호와 관련임. 2. “선사로 ~고덕지구간 도로확장공사”의 보도내 차량출입통제를 위하여 설치한 볼라드에 대해 강동구 그린파킹사업과 연계된 주택담장 허물기 사업 활성화와 이면도로 주택지 진·출입로가 많은데도 주변여견을 반영하지 못하여 강동구에서 추가로 요구하여 수량 증가에 따른 실정보고사항에 대하여 감리단 의견과 같이 승인통보하오니 업무에 참고하시기 바라며, 3. 아울러, 금번 승인된 물량이외 추가로 설치가 필요한 경우 현장조사 등을 면밀히하여 수량 증가가 최소화 되도록 하시기 바랍니다.

서울특별시