『 부의안 설명서 』

암파쇄 수량 증가(보통암) 설계변경(토목) 검토

Ⅰ		공 사 개 요

구 분	신내3지구 4단지 도시형생활주택
대 지 면 적	8,965.00㎡
주 택 건 설	3개동 291세대 (행복주택)
주 차 대 수	133대
공 사 기 간	2015.10.28.~2017.05.11.
공 사 비	15,554,598천원 (토목 1,680,514천원)
조 감 도

Ⅱ		추 진 경 위

◦ 신내3지구 4단지 도시형생활주택 건축계획 변경 계획(안) 송부[건축설계부-1502호(2016.05.13.)]

◦ 암파쇄 공법 변경 실정보고 제출[한일 HE1504-9504-204호(2016.06.10.)]

◦ 설계변경(암파쇄 공법 변경)승인 요청 제출 [한일 HE1504-9504-266(2016.08.03.)]

◦ 설계변경심사위원회(신내3지구 4단지) 개최결과 보고[토목조경공사부-3388호(2016.09.29.)]

◦ 실정보고 승인 통보 [신내 3지구 4단지 설계변경 (암파쇄 공법 변경)][(토목조경공사부-3399호(2016.09.29.))

◦ 암판정 위원회 결과보고[토목조경공사부-4524호(2016.12.14.)]

◦ 전기발전기실 암파쇄(보통암)수량 증가에 따른 설계변경 실정보고[한일 HE1504-9504-457(2016.12.20.)]

Ⅲ		현황 및 문제점

◦ 신내 3지구 4단지 도시형생활주택 건설공사 현장의 암발파 중지 민원에 따른 암파쇄 공법 변경 및 건축구조물 이동 설계 후 암파쇄 수량 설계변경 진행

(토목조경공사부-3414, 2016.09.30.)

◦ 이동한 구조물 중 전기발전기실 부지 지하 저면에 암(보통암)이 노출되어 추가 파쇄 수량 발생

Ⅳ		검 토 사 항

① 견적단가 대비표(무진동 코아, 할암, 보통암)

항 목	단위	신서 이엔지	재우토건	㈜한길B&T	㈜대원이앤씨	비 고
무진동 암파쇄 코아 할암 보통암	원/ M3	314,180	356,000	363,800	375,000	견적가
		285,000	322,937	330,012	340,172	협의율 90.7125%

② 수량(변경) 대비표

구분	단위	당 초	변 경	증 감
				(B-A)
보통암	M3	-	878	878
합 계	M3	-	878	878

Ⅴ		공 사 비 검 토

◦소요예산 검토 : (증) 306,708(제잡비 포함)

항 목	공 사 비(천원)			비 고
	변경전	변경후	증감액
무진동 코아(할암,보통암)	-	250,230	250,230	신규단가*협의율
연암상차	-	1,588	1,588	계약단가
원석대공제	-	-17,891	-17,891	계약단가
소 계	-	233,927	233,927
간 접 비	-	72,781	72,781
합 계	-	306,708	306,708

Ⅴ		조 치 계 획

◦ 상기 검토사항과 같이 시행하고 추후 설계변경시 정산 반영 조치. 끝.