부  의  안

1. 제안부서 : 택지사업본부 택지조성부

2. 제안근거 : 우리공사 설계변경심사위원회 운영기준(2016.02)

3. 제안사유

○ 의안 제1호 -「내곡지구 내 여의천 인도교 설치공사 검토」
내곡지구 내 여의천 내 인도교 설치 요청 민원 및 관리청 요청에 따라 인도교 설치공사에 대한 설계변경 타당성 및 낙찰율 산정의 적정성 부의

- 소요예산 : 328,872천원(부가세 및 지급자재비(26,325천원) 포함)

○ 의안 제2호 -「내곡지구 내 신원천 교량 하부 산책로 조성 공사 검토」
내곡지구 내 신원천 좌안 신원1교 부근 둑마루 산책로 연결 동선 단절 개선 요청 민원 및 관리청 요청에 따라 신원1교 하부 산책로 조성 공사에 대한 설계변경 타당성 및 낙찰율 산정의 적정성 부의

- 소요예산 : 303.393천원(부가세 및 지급자재비(25,753천원) 포함)

※ 총 소요예산 :  632,265천원(제경비, 부가세, 지급자재 포함)

4. 심사․의결사항 : 설계변경 타당성 등 원안가결

※ 의안 제1, 2호의 신규품목에 대하여 계약심사부 기술심사 결과 의견 없음 통보

(계약심사부-3338호(2017.12.13.) 및 246호(2018.01.24.))

5. 붙임

1) 부의안 설명서 각 1부.

2018년  02월  05일

제 안 자 : 택지사업본부 택지조성부 토목4급  설 재 훈  □

의안 - 1

내곡지구 내 여의천 인도교 설치공사 검토

내곡지구 내 여의천 내 인도교 설치 요청 민원 및 관리청 요청에 따른 인도교 설치공사에 대하여 다음과 같이 검토코자 함.

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 내곡 보금자리주택지구 조성공사

○ 위    치 : 서울시 서초구 내곡동, 신원동, 염곡동 일원

○ 공사기간 : 2011.11.30. ~ 2018.05.31

○ 도 급 자 : 큰빛종합건설(주), 이수건설(주)

○ 도 급 비 : 39,499백만원

Ⅱ		관 련 근 거

○ 2017.01.09. : 서초구와 서울주택도시공사간 상호협력협약서

- 본마을 인도교, 신원1교 하부 산책로 설치 등

○ 2017.10.20. : 내곡 공공주택지구 여의천 인도교 설계도서 송부(택지설계부-2940호)

Ⅲ		현황 및 문제점

○ 본 사업 시행 전 여의천 내 인도교가 설치되어 있었으나, 하천정비공사 시 해당위치의 인도교를 철거하고, 도로 계획 동선에 따라 타 위치에 교량이 신설되었으나,

○ 본마을 주민들이 교량 철거 전 위치에 추가 교량 설치를 요구하는 민원 지속적 제기되었으며, 관리청과의 우리공사간의 상호협력협약서에 따라 인도교 설치가 필요한  실정임.

Ⅳ		검 토 내 용

○ 본마을 주민들의 지속적인 민원 및 관리청과 우리공사간의 상호협력협약서에 의거 택지설계부로부터 송부된 설계도서를 반영한 여의천 내 인도교 설치공사를 시행하는 것이 타당하다고 판단됨.

○ 공사 주요 물량 검토

구 분		당초	변경	증감	비고
1.토공	터파기	-	233㎥	증) 233㎥
	되메우기	-	147㎥	증) 147㎥
2.강관파일공	천공 및 항타 D508	-	8본	증) 8본
3.강합성라멘	L=25.5m B=4.0m	-	1식	증) 1식
4.가시설공	H-PILE+토류판	-	2개소	증) 2개소
	H-PILE천공항타	-	24본	증) 24본
5.부대공	확장블럭설치	-	23m	증) 23m
	시트형탄성포장	-	145㎥	증) 145㎥

○ 단가 검토

- 신규공종 : 신규단가에 협의낙찰율 적용[100+79.99]/2=89.99%]

※ 계약심사부-3338호(2017.12.13)로 기술심사 완료(별도의견없음)

○ 공사비 검토

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
직접공사비	-	222,282	증) 222,282
제잡비 및 부가세	-	80,265	증) 80,265
도 급 액	-	302,547	증) 302,547
지급자재	-	26,325	증) 26,325
총공사비	-	328,872	증) 328,872

Ⅴ		조 치 계 획

○ 상기 검토내용에 대하여 설계변경심사위원회 심의 의결 결과에 따라 추후 설계 변경시 정산 ․ 반영

의안 - 2

내곡지구 내 교통안전시설물 추가 공사 검토

내곡지구 교통영향평가 보고서 변경 등을 반영한 경찰서 교통안전시설 심의 교통안전시설 개선 설치 통보에 따른 공사시행을 다음과 같이 검토함.

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 내곡 보금자리주택지구 조성공사

○ 위    치 : 서울시 서초구 내곡동, 신원동, 염곡동 일원

○ 공사기간 : 2011.11.30. ~ 2018.05.31

○ 도 급 자 : 큰빛종합건설(주), 이수건설(주)

○ 도 급 비 : 39,499백만원

Ⅱ		관 련 근 거

○ 2017.01.09. : 서초구와 서울주택도시공사간 상호협력협약서

- 본마을 인도교, 신원1교 하부 산책로 설치 등

○ 2017.09.20. : 내곡 공공주택지구 신원1교 하부 신원천 산책로 설계도서 송부(택지설계부-2660호)

Ⅲ		현황 및 문제점

○ 내곡지구 내 신원천 좌안 신원1교 부근 둑마루 산책로의 연결 동선 단절에 대한 개선 요청 민원이 지속적으로 제기되었으며, 관리청과의 우리공사간의 상호협력협약서에 따라 인도교 설치가 필요한 실정임.

Ⅳ		검 토 내 용

○ 본마을 주민들의 지속적인 민원 및 관리청과 우리공사간의 상호협력협약서에 의거 택지설계부로부터 송부된 설계도서를 반영한 신원천 하부 산책로 조성공사를 시행하는 것이 타당하다고 판단됨.

○ 공사 주요 물량 검토

구 분		당초	변경	증감	비고
1.축제공	흙쌓기/토사	-	684㎥	증) 684㎥
	호안블록, 옹벽블록헐기	-	771㎡	증) 771㎡
2.호안	식생호안블럭(대형자연석형)	-	263㎡	증) 8㎡
	무근콘크리트타설(다짐포함)		6㎥	증) 6㎥
3.도로 및 포장공	스텐실 포장	-	453㎡	증) 453㎡
	도로경계석		302m	증) 302m
4.우,오수공	우수암거 및 차집관거맨홀설치	-	2개소	증) 2개소
5.식생옹벽블럭	식생옹벽블럭	-	495㎡	증) 495㎡
6.부대공	PE방호벽설치 및 해체	-	66EA	증) 66EA
	안전난간 철거 및 재설치	-	60m	증) 60m

○ 단가 검토

- 신규공종 : 신규단가에 협의낙찰율 적용[100+79.99]/2=89.99%]

※ 계약심사부-246호(2018.01.24.)로 기술심사 완료(별도의견없음)

○ 공사비 검토

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
직접공사비	-	193,744	증) 193,744
제잡비 및 부가세	-	62,050	증) 62,050
도 급 액	-	255,794	증) 255,794
폐기물처리비		21,846	증) 21,846
지급자재	-	25,753	증) 25,753
총공사비	-	303,393	증) 303,393

Ⅴ		조 치 계 획

○ 상기 검토내용에 대하여 설계변경심사위원회 심의 의결 결과에 따라 추후 설계 변경시 정산 ․ 반영