[첨부 ＃1]

부  의  안

1. 제안부서 : 도시공간사업본부 마곡위례사업처 기전사업부

2. 제안근거 : 설계변경 심사위원회 운영기준(2021.04.28.)

4. 운영절차, 4-1 설계변경위원회, 가 심사·의결대상

(나) SH공사의 필요(건설환경개선 및 SH공사의 대외이미지 개선과 품질향상, 고객만족 등

효과)에 의한 설계변경

(라) 소요자재의 수급방법 변경

3. 제안사유 : [첨부 ＃4] 제안사유서 참조

4. 심사·의결 요구사항

○ 설계변경 사유(타당성 등)

설계변경 항목	사유
1. 전동버터플라이밸브 사급자재 변경 건	- 추정가격 4천만원 미만으로 중기청 직접구매 의무대상이 아니므로 사급전환하여 설치 진행
2. 전동 호이스트 설치 건	- 펌프 중량이 대당 450kg이기 때문에 기존 설계된 체인블록으로는 인양 어려움
3. 안전난간 설치 건	- 펌프 인양 개구부에 안전난간이 설치되어 있지 않아 추락위험 발생

○ 단가적용 기준(기존 증·감 수량, 신규비목 등)

구 분	규 격	단위	수 량			비 고
			당초	변경	증감
전동 버터플라이밸브	Φ100mm×10kg/㎠ Φ150mm×10kg/㎠	대	2	2	0	설치 → 자재+설치
펌프 인양 장치	수동식 체인블록	대	1	-	-1
	전동호이스트 (0.49TON*4m)	대	-	1	1	신규비목
안전난간 설치	STS304	식	-	1	1	신규비목

- 신규비목 적용 단가는 비교견적서, 품셈, 물가지 비교하여 최저가에 협의낙찰률(85.355%) 곱하여 산출

○ 신규비목에 대한 적용낙찰률(제시근거, 사유)

근거	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제 74조 (설계 변경으로 인한 계약금액의 조정)
사유	계약낙찰률(A)	시공사요구(B)	협의낙찰률(A+B)/2
	70.71%	100%	85.355%

5. 참고 사항 : 붙임의 설계변경 검토서 참조

2021년 11월   일

제안자 : 도시공간사업본부 마곡위례사업처 기전사업부  기계5급  이 종 윤 □

[첨부 ＃2]

설계변경심사위원회 위원 선정

1. 개최일시 : 2021년 11월

2. 의결방법 :“서면결의”(코로나19로 인한 사회적 거리두기 고려 서면결의 시행)

3. 선정기준 : 설계변경심사위원회 운영기준(2021.04.28.)

4. 운영절차, 4-1 설계변경심사위원회, 나. 위원회 구성

4. 위원선정

구 분	소 속	직 위	성 명	비 고
위 원 장	도시공간사업본부 마곡위례사업처	처 장	남 시 명
부위원장	건설사업본부 건축설계처 기전설계부	부 장	박 우 석
위 원	건설사업본부 건축설계처 기전설계부	차 장	최 정 훈
위 원	건설사업본부 건설사업처 견적발주부	대 리	민 중 훈
위 원	건설사업본부 에너지기술사업처 기계사업부	파트장	이 성 주
위 원	기획조정실 재정관리부	파트장	이 준 철
위 원	기획조정실 예산자금부	파트장	홍 은 수

위와 같이 설계변경 심사위원회 위원을 선정합니다.

2021년 11월   일

위 원 장 : 도시공간사업본부 마곡위례사업처장  남 시 명  □

[첨부 ＃3]

설계변경심사위원회 소집통보

수 신 : 건설사업본부 건축설계처 기전설계부

건설사업본부 건설사업처 견적발주부

건설사업본부 에너지기술사업처 기계사업부

기획조정실 재정관리부 / 예산자금부

다음과 같이 위원회 소집을 통보합니다.

1. 일    시 : 2021년 11월

2. 의결방법 : “서면결의”(코로나19로 인한 사회적 거리두기 고려 서면결의 시행)

3. 의    안 :『서울 위례지구 택지개발사업 단지조성공사(3공구) 수질정화시설』관련 설계변경 적정성 심의

제안번호	제안 제목(안건)	공 종	제안내용	제안부서
1	전동버터플라이 밸브 자재수급 방식 변경 (지급자재 → 사급자재)	기 계	[첨부＃4] 제안사유서 참조	도시공간사업본부 마곡위례사업처 기전사업부
2	펌프 인양용 전동호이스트 설치 (기존 체인블럭 → 전동호이스트)
3	안전난간 설치

4. 세부내용 : [첨부 ＃4] 제안사유서 참조

2021년 11월   일

위 원 장 : 도시공간사업본부 마곡위례사업처장  남 시 명  □

[첨부 #4]

제 안 사 유 서

1. 제    목 :『서울 위례지구 택지개발사업 단지조성공사(3공구) 수질정화시설』관련 설계변경 적정성 심의

2. 제안사유

-  우리 공사에서 시행하는『서울 위례지구 택지개발사업 단지조성공사(3공구) 수질정화시설』 관련하여 설계변경 사항이 발생하여 이에 대한 타당성 및 단가적용기준의 적정성, 계약상대자 간 신규비목에 대한 적용낙찰율의 적합성을 심사․의결코자 설계변경심사위원회를 다음과 같이 개최하고자 합니다.

3. 관련근거

○ 지시부(전동버터플라이밸브 사급자재 전환 변경 적용 검토)

[기전사업부-4136(2019.10.21.)]

○ 실정보고(장지천 수질정화시설 펌프인양호이스트 및 난간설치 관련 현황보고)

[서울위례 제2021-277호(2021.09.28.)]

4. 주요 설계변경사항                                                           (단위 : 천원)

연번	구분	주요 변경 사항	변 경 사 유
1	전동버터플라이 밸브 자재수급 방식 변경	지급자재 품목을 사급자재로 변경하여 설치	추정가격 4천만원 미만으로 중기청 의무구매 대상이 아니므로 사급자재로 변경 설치
2	펌프 인양용 전동호이스트 설치	기존 체인블록 삭제 후 전동 호이스트 설치	펌프 중량이 대당 450kg으로 기존 체인블록으로 인양시 어려움 발생
3	안전난간 설치	신규 설치	펌프 인양 개구부에 안전난간 미설치로 추락 위험

5. 단가적용 및 낙찰율

1) 단가적용

- 신규비목 : 견적서, 물가지, 품셈을 통해 단가 산정 후 비교하여 최저 단가 적용

- 기술심사 결과 적용[견적발주부-5805(2021.11.25.)]

품 명	심사결과	기술심사 적용 금액 증·감	비고
펌프 인양용 호이스트	현재 신규단가 1식 견적사항을 전문가격조사기관,표준품셈 등에 따라 재산출 반영 검토	(감)7,211,000	원 단위 절사
안전난간 설치	기존 잡철물제작설치(간단) → 용접식난간 설치 적용 검토	(감)674,000

2) 신규비목 낙찰율

- 협의낙찰률 85.355% 적용

6. 계약금액 변경현황

(단위 : 원)

구 분	계약금액 변경			비고
	변경 전	변경 후	증･감
서울 위례지구 택지개발사업 단지조성공사(3공구)	90,989,878,000 (기계 102,267,000)	90,999,305,000 (기계 111,694,000)	(증)9,427,000