부  의  안

1. 제안부서 : 건설안전사업본부 토목조경공사부

2. 제안근거

￮ 설계변경심사위원회 운영기준(2015.05) 4. 운영절차 / 4-1설계변경심사위원회 / 가. 심사･의결대상

￮ 실정보고

- 전기발전기실 암파쇄(보통암)수량 증가에 따른 설계변경 실정보고[한일 HE1504-9504-457호(2016.12.20.)]

3. 제안사유

￮ “신내3지구 4단지 도시형생활주택 건설공사”와 관련하여 전기발전기실 암파쇄(보통암) 수량 증가에 따른 설계변경 사항 발생

※ 소요예산 : 증)  306,708 천원

4. 심사 ․ 의결 요구사항 : 원안가결

￮ 설계변경 사유(타당성 등)의 적정성

￮ 단가적용기준(기존 증·감수량, 신규비목 등) 적정성

￮ 신규비목에 대한 적용낙찰율

5. 붙임 : 부의안 설명서 1부

2016년  12월   29일

제 안 자 : 건설안전사업본부 토목조경공사부 토목3급 백 용 철 □

건설안전사업본부 토목조경공사부 토목6급 조 재 승 □