누수탐지 장비 구입

최신형 누수탐지기를 구매하여 탐지율을 향상시켜 누수를 조기에 발견, 복구하여 유수율 향상에 기어코자 함.

□ 사업개요

○ 다점형상관식 누수탐지기 : 2대(11. 21 계약완료)

○ 음청식 누수탐지기 : 2대(11. 30한 구매예정)

○ 전자식 청음봉 : 1대(현장민원과)

□ 예산집행내역

(기준일 : 2014.11.21.)

사업명	예산액	예산현액	추산액	추산율
누수탐지장비구입		122,530천원	93,115천원	75.99%

※ 다점형상관식 누수탐지기 : 110,000천원

음청식 누수탐지기 : 10,000천원

전자식 청음봉 : 2,530천원(현장민원과)

□ 부진사유 및 대책

○ 부진사유

- 당초 110,000천원이 구매예산이나 단가조정으로 구매예산 절감

(절감액 : 16,885천원)

- 음청식 누수탐지기 구입비 10,000천원 추가배정(2014.11.10.)으로        미집행

- 현재 보유 장비로 민원처리 가능하여 신규장비(전자식 청음봉) 미구매

○ 대책

- 음청식 누수탐지기 2014.11.30한 구매예정

□ 향후전망

○ 음청식 누수탐지기 구매후 총추산액은 103,115천원으로, 추산율       84.2% 달성 전망

- 불용액 19,415천원(예산절감 16,885천원, 현장민원과 2,530천원)

배급수관 환경개선

수돗물의 공급과정에서 단수나 적수가 발생 할 수 있는 취약관망을 정비하여 고품질의 아리수를 공급코자 함

□ 사업개요

○ 사업비 : 152백만원

○ 공사개요

- 단일배관 이중화 정비(2개소) : D=100~300, L=136m 부설

- 단절관 순환관망 정비(6개소) : D=80~150mm, L=81m 부설

□ 예산집행내역

(기준일 : 2014.11.21.)

사업명	예산액	예산현액	추산액	추산율
배급수관 환경개선	152,300	138,300	31,503	22.78

□ 부진사유 및 대책

○ 부진사유

- 배급수관 환경개선 사업은 완료하였느나, 연간단가 계약의 특성상

정산을 시행하지 않아 추산율이 부진함

○ 대책

- 단가계약 정산을 12.20일까지 시행하여 추산율 향상

□ 향후전망

○ 추가집행 계획은 아래와 같으며, 추산율 98% 달성 예정임

- 상수도공사 도급비 50,000천원,  - 도로굴착복구비 50,000천원,

- 폐기물처리비 5,000천원

송∙배수관 정비

누수 다발관로 및 적수발생의 원인이 되는 노후 송배수관을 정비하여 시민에게 깨끗하고 맑은 아리수를 공급코자 함

□ 사업개요

○ 사업비 : 3,300백만원

○ 공사개요

- 송배수관 정비(3건) : D=500~700mm, L=1.76km

□ 예산집행내역

(기준일 : 2014.11.21.)

사업명	예산액	예산현액	추산액	추산율
송․배수관정비	3,300,000	2,670,849	1,586,489	59,40

□ 부진사유 및 대책

○ 부진사유

- 송배수관 정비사업 3건중 1건은 완료하였고 2건은 완료후 설계변경        중으로 도급비 증액분 및 도로굴착 복구비 미확정으로 추산율이 부진함

○ 대책

- 설계변경 및 정산을 조기 시행하고, 도로관리청과 협의하여 도로굴착

복구비의 신속히 납부추진

□ 향후전망

○ 추가집행계획은 아래와 같으며 추산율 94% 달성 예정임

- 강서구청 사거리 ~ 발산역간 송배수관 정비공사

∙도급비 증액 2억원, 도로굴착 복구비 6억원, 총 8억원 지출 예정

- 오류동 86~134번지간 송배수관 공사

∙도로굴착 복구비 1.3억원을 12.10일중 납부예정

수도계량기 보호통 보온재등 정비

보온재 파손, 망실 등으로 보온 미비된 보호통에 대하여 보온 성능이 우수하고 파손 우려가 없는 PE재질의 보온재로 정비하여 동파를 예방하는 사업임

□ 사업개요

○ 보온재 정비 1,280개

- 15mm : 507개, 20mm : 773개

□ 예산집행내역

(기준일 : 2014.11.21.)

사업명	예산액	예산현액	추산액	추산율
수도계량기 보호통 보온재등 정비		41,000천원	30,770천원	75.05%

□ 부진사유 및 대책

○ 부진사유

- 보호통 보온재 정비는 11.21현재 100% 달성 완료하였으나

정산 미시행으로 추산율이 부진한 실정임

○ 대책

- 단가계약 정산을 12.20일까지 시행하여 추산율을 제고

□ 향후전망

○ 12.20일까지 예산액 100% 집행 예정임

- 집행예정액 : 10,230천원

유량계 신설 및 교체

유수율 향상 및 서울시 상수도 중블록 조정계획에 따라 구역유량계를 추가 설치하여 급수구역이 광범위한 신정4중블록을 신정4중블록(개봉동)과 신정6중블록(오류동)으로 분리하여 효과적인 유수율 분석업무를 수행하고자 함

□ 사업개요

○ 유량계실 설치 2개소

○ 초음파유량계 및 제어판 구매 및 설치 2개소

□ 예산집행내역

(기준일 : 2014.11.21.)

사업명	예산액	예산현액	추산액	추산율
유량계 신설 및 교체	140,000천원	140,000천원	23,762천원	16.97%

※ 유량계 구매 : 23,762천원

□ 부진사유 및 대책

○ 유량계실 2개소 중 1개소(900mm)는 설치완료하였으나

○ 신정6중블록(오류동) 유량계실(600mm) 설치는 설치 위치가

경인로 도로상으로 교통량 및 고압가스관등 지하지장물이 많아

배관탐지, 시험굴착 등으로 많은 시간이 소요되었음

○ 현재 시공중으로 ‘14.11.30일까지 유량계실 설치 완료예정임

□ 향후전망

○ 공사비 집행계획

- ‘14.12.20일까지 공사비 및 포장복구비 집행예정

․도급비 : 66,238천원,  ․포장복구비 : 50,000천원

유수장애 상수도관 이설

하수도 시설물에 저촉되는 상수도관을 이설하여 하수흐름을 원활히 하고, 오염원으로부터 깨끗한 수돗물 보존과 효율적인 상수도시설물 유지관리를 위한 사업임

□ 사업개요

○ 추진목표 : 유수장애 상수관 이설 12개소

○ 사 업 비 : 50백만원

□ 예산집행내역

(기준일 : 2014.11.21.)

사업명	예산액	예산현액	추산액	추산율
유수장애 상수도관이설	50,000천원	12,000천원	6,085천원	50.71%

□ 부진사유 및 대책

○ 부진사유

- 사업목표 대비 실적을 100% 달성 완료하였으나 정산 미시행 으로

추산율이 부진한 실정임

○ 대책

- 단가계약 정산을 12.20일까지 시행하여 예산집행 완료예정

□ 향후전망

○ 12.20일까지 예산액 100% 집행 예정임

- 집행예정액 : 5,915천원

직결급수 전환 및 물탱크 철거

○ 건물 옥상의 소형물탱크는 햇빛에 의한 조류발생과 청소불량 등으로 인해 수질관리에 취약함.

○ 깨끗한 아리수를 시민에게 공급하기 위해 건물 옥상에 설치된 물탱크를 철거 후 직결급수로 전환코자 함.

□ 사업개요

○ 추진목표 : 268개소

○ 사 업 비 : 95백만원

□ 예산집행내역

(기준일 : 2014.11.21.)

사업명	예산액	예산현액	추산액	추산율
직결급수 전환 및 물탱크 철거	95,000천원	51,000천원	31,922천원	62.59%

□ 부진사유 및 대책

○ 부진사유

- 사업목표 대비 실적을 100% 달성 완료하였으나 정산 미시행으로          인하여 추산율이 부진한 실정임.

○ 대 책

- 단가계약 정산을 12.20일까지 시행하여 추산율 제고코자 함.

□ 향후전망

○ 12.20일까지 예산액 100% 집행 예정임.