부진사유 자체분석 결과

기관명 : 강서수도사업소

□ 추진현황

○ 집행율(2016.7.15.현재)                                (단위 : 백만원)

사업명	예산 현액	원 인 행위액	지출액	집행율(%)
				원인행위액 기준	지출액 기준
노후상수도관(송배수관)지원	4,356	2,508	994	57.6	22.8
노후상수도관(배급수관)지원	5,132	3,020	1,724	58.9	33.6

□ 추진상 문제점

○ 없음

□ 부진사유

○ 양천향교역 ~ 발산역 배수관 정비공사는 관급자재 출고 지연(강관)으로        실 착공이 늦어짐

○ 구로동 454번지외 3개소 배급수관 정비공사는 유관기관 협의(관리청 포장복구 불가로 공사 중지)로 공사 지연

□ 집행전망

○ 송·배급수관 정비공사(6건)는 현재 모두 정상 추진중이며, 송배수관정비공사 2건은 8월중 기성금 지출 예정.

○ 공사완료로 설계변경 진행중인 공사(2건)등 모든 공사건 기한 내 준공 가능함