부진사유 자체분석 결과

기관명 : 중부수도사업소

□ 추진현황

○ 집행율(2016.7.25.현재)                                (단위 : 백만원)

사업명	예산 현액	원 인 행위액	지출액	집행율(%)
				원인행위액 기준	지출액 기준
옥내 노후배관 교체지원	1,146	494	494	43.1	43.1
노후상수도관(송배수관)지원	5,235	2,206	803	42.1	15.3
노후상수도관(배급수관)지원	9,972	5,075	2,709	50.9	27.21

옥내 노후배관 교체지원

□ 추진상 문제점 및 부진사유

○ 지역여건상 상가 및 빌딩 밀집지역으로, 타 사업소에 비해 아파트가

상대적으로 적어 공용배관 교체에 한계가 있음

○ 대규모의 재개발 대상지역(장위재정비, 한남재정비 등)이 많고, 세입자        주거비율이 높아 옥내배관 교체에 상대적으로 관심 부족

□ 대책

○ 상반기 옥내배관 교체지원 실적은 저조하였으나, 하반기에는 공사 중

및 공사예정인 아파트 단지(정릉우성아파트 등 6개단지 1,600여가구 6.4억원)가

다수 있어 예산 집행률이 목표치에 근접할 것으로 예측됨

□ 집행전망

○ 옥내 노후배관 교체지원사업은 연말까지 3,000가구, 1,550백만원 집행        예정으로 예산현액 대비 집행율 95% 이상 전망함

□‘17년도 예산요구액

※ 옥내 노후배관 교체지원 사업의 경우 ‘16년도 예산을 집행하여 본 결과

‘17년도에는 2,500가구 1,350백만원이면 실제 집행이 가능할 것으로 판단

노후 상수도관 지원

□ 추진상 문제점

○ 비굴착 갱생 공사의 신기술 공법 심의 등 절차 준수에 따른 과도한

기간 소요로 개착식 공사에 비하여 공사발주까지 기간이 많이 소요됨

□ 부진사유

○ 본부 및 본청 비굴착 갱생 신기술공법 심의 등으로 공사 발주 지연

○ 건설폐기물 처리용역 낙찰 업체 적격심사 탈락에 따른 계약 지연으로 배급수관 정비공사 착공 지연

○ 소월길 송배수관정비공사 낙찰 업체 적격심사 탈락에 따른 계약 지연

□ 대책

○ 차기 년도에는 신기술공법 조기 심의 완료로 공사 발주기간 단축

○ 소월길 송배수관정비공사 낙찰업체 선정시 조기 착공 예정

□ 집행전망

○ 배급수관 정비공사는 현재 정상 추진중이며, 소월길 송배수관 정비공사 또한 착공시 연내 공사완료 될 것으로 전망 됨