가압장·배수지 등 시설물 유지관리

배수지, 가압장에 설치되어 있는 상수도 시설물의 환경을 개선하여 수돗물에 대한 신뢰도를 향상하고 시민에게 양질의 수돗물을 공급

□ 사업개요

○ 위    치 : 강서수도사업소 관내 배수지, 가압장

○ 규    모 : 배수지, 가압장내 환경정비 및 정밀안전진단

○ 사업기간 : 2014. 1. ~ 12.

□ 예산집행내역

(기준일 : 2014.11.21.)

사업명	예산액	예산현액	추산액	추산율
가압장·배수지등 시설물 유지관리	394,030	616,030	374,140	60.73

□ 부진사유 및 대책

○　년간단가계약으로 정산시기 미도래

- 12월초 강서구 관내 우장산배수지 유출밸브 D=900㎜ 신설 설치후        정산예정

□ 향후전망

○ 12월말까지 예산 97% 집행가능

- 2014년 강서구관내 시설물 설치 및 보수공사(년간단가)외 1개소          12월중 정산 시행

- 목동배수지외 13개소 정밀안전진단용역 12월중 준공

노 후 밸 브 정 비

고장․노후밸브를 교체하여 수질오염을 방지하고 정상적인 밸브 기능을 확보하여 수돗물에 대한 신뢰도를 향상하고 시민에게 양질의 수돗물을 공급

□ 사업개요

○ 위    치 : 강서수도사업소 관내

○ 규    모 : 고장 및 노후밸브 250개 교체

○ 사업기간 : 2014. 1. ~ 12.

□ 예산집행내역

(기준일 : 2014.11.21.)

사업명	예산액	예산현액	추산액	추산율
노후밸브정비		1,300,000	918,745	70.67

□ 부진사유 및 대책

○　년간단가계약으로 정산시기 미도래

- 12월중 노후밸브 정비 120개소에 대한 정산

□ 향후전망

○ 12월말까지 예산 90% 집행가능

- 2014년 강서구관내 시설물 설치 및 보수공사(년간단가)외 1개소          12월중 정산 시행

교체장애 수전정비

미교체 장애수전을 체계적으로 관리하고 조기에 정비완료하여 유수율 증대에 기하고자 함

□ 사업개요

○ 2014년 교체장애 수전 정비

- 정비목표 : 135건(서울시귀책:103건, 수요가귀책:32건)

□ 예산집행내역

(기준일 : 2014.11.21.)

사업명	예산액	예산현액	추산액	추산율
교체장애수전정비	52,200	42,200	21,599	51.18

□ 부진사유 및 대책

○　년간단가계약으로 정산시기 미도래

- 교체장애수전 정비완료.(`14.11.24. 11,638천원 추가집행)

□ 향후전망

○ 12월말까지 예산 100% 집행가능

- 2014년 양천구 관내 급수공사(년간단가)외 1개소 12월중 정산 시행

음수대 설치사업

학교에 설치된 고장, 철거 음수대를 교체·정비하고 추가 설치를 통해 믿고 마실 수 있는 음용환경을 제공함으로써 음용향상에 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 사업대상 : 총 51개소

○ 사업개요 : 음수대 245대(L=1,354m)

구 분	합 계	고장, 철거음수대		추가 수요	높낮이 부적정		내용연수 도래	신 규 음수대
		교 체	정 비		교 체	정 비
대 수	245	6	6	134	1	1	83	14

□ 예산집행내역

(기준일 : 2014.11.21.)

사업명	예산액	예산현액	추산액	추산율
음수대 설치사업		114,110	69,645	61.03

□ 부진사유 및 대책

○　음수대 본부 일괄 구매로 설치 시기 지연

- 배관공사 및 음수대 설치 완료되어 12월중 정산

□ 향후전망

○ 12월말까지 예산 92% 집행가능

- 2014년 아리수직결음수대 설치공사(경서중학교외8개소)외 2개소           12월중 정산 시행