문서번호	토목부-23695
결재일자	2014.12.1.
공개여부	비공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
협조
	주무관

부체도로 임시개통에 따른 교통안전시설물 및 제설작업 시행 검토

(방화대교남단 접속도로 건설공사)

2014. 12

도시기반시설본부

토 목 부

부체도로 임시개통에 따른 교통안전시설 및 제설작업 시행검토

(방화대교남단 접속도로 건설공사)

치현터널 시점부 부체도로 임시개통에 따른 교통안전시설물 설치 및 제설작업 시행에 따른 실정보고 검토임.

Ⅰ		관련근거

○ 방화제2014-149호, -150호(2014.11.27.) 실정보고

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 강서구 방화동 ~ 올림픽대로

○ 규    모 : 도로개설 B=5.75~18.0m, L=3,021m

(교량 756m, 터널 949m, 토공도로 1,316m)

○ 공사기간 : 총차 2005.10. 5. ~ 2015.10.31.

10차 : 2013. 2.21. ~ 2014.12.31.

○ 총사업비 : 109,807백만원[도급비 : 66,093백만원]

10차 : 10,000백만원

○ 감 리 사 : (주)삼보기술단   ○ 시 공 사 : 금광기업(주) 외 1

Ⅲ		감리단 보고내용

교통안전시설물 설치

① 보고사유

- 부체도로#1의 조기개통을 요구하는 민원으로 교통안전 시설 개선  설치 통보에 따른 공사비(교통안전시설물설치 및 설계, 감리비)증액 조정

- 교통안전시설물 설치 설계 및 감리업체 지정 검토

② 보고내용

- 교통시설물 현황

구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
노면표지(융착식-고휘도)	너비 : 15cm	㎡	181	백색,황색
교통안전표지판	Φ600, 600X600	개소	4	규제:2, 지시:2
PE방호벽+윙카	1200X600X900	m	168	임시보행로 등
경광등(쏠라미니장방형)	180X400	개소	3	2구

- 교통안전시설물 설치 설계 및 감리업체 지정현황

구분	업체명	대표자	종 목	주 소	비 고
설계	(주)트래픽스	김희수	도로․교통․전기설계및감리 (신고번호: 제E-9-3263호)	서울시 송파구 토성로 26, 502 (풍납동,강진빌딩5층)
감리
시공	(주)다물그린	김영옥	도장․철물공사․페인트 (등록번호:경기98-8-22)	서울시 구로구 개봉동 315-10

- 단가 및 공사비 증,감 현황

· 계약단가 : 기 계약단가가 없어 신규비목 단가적용(중간율 90.522%)

· 공사비 증,감 현황                                (단위 : 천원)

구 분	공 사 금 액			비 고
	당 초	변 경	증 . 감
교통안전시설공	-	15,731	15,731
직접공사비	-	15,731	15,731
제경비	-	1,917	1,917
교통안전시설물 설계용역비	-	732	732
교통안전시설물 감리용역비	-	240	240
부가가치세		1,862	1,862
도 급 비	-	20,482	20,482

③ 검토의견

- 교통안전시설물 설치는 서울특별시 노면표시 공사설계설명서(시방서) 개정 및 서울지방경찰청 교통규제심의 협의결과 반영, 설계 및 감리, 시공업체의 자격요건은 적정함

치현터널 시점부 부체도로 제설작업 시행

① 보고사유

- 부체도로#1의 임시개통에 따라 강설로 인한 차량 및 주민들의 안전  사고 방지를 위해 제설작업을 실시하고자 함

② 보고내용

- 제설작업구간(종단경사 : 9.5 ~ 14.8%)

제설작업

- 제설작업 투입인력 및 자재(‘14.11.15.∼ ’15. 3.15.)

구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
제 설 작 업		일	28	주,야간
제 설 함		개소	3
교통안전표지판	미끄럼주의 + 보조	개소	2

- 단가 및 공사비 증,감 현황

· 계약단가 : 기 계약단가가 없어 신규비목 단가적용(중간율 90.522%)

· 공사비 증,감 현황                                 (단위 : 천원)

구 분	공 사 금 액			비 고
	당 초	변 경	증 . 감
교통안전시설공	-	17,342	17,342
직접공사비	-	17,342	17,342
제경비	-	4,068	4,068
공 급 가 액		21,410	21,410
부가가치세		2,141	2,141
도 급 액	-	23,551	23,551

③ 검토의견

- 부체도로 #1 임시개통에 따라 강설로 인해 차량 및 주민들의 사고  방지를 위한 제설작업을 반영함이 타당함(작업결과에 의거 정산)

Ⅳ		검토의견 및 조치계획

○ 부체도로#1의 임시개통에 따른 교통안전시설물 설치 및 제설작업시행에 대하여 감리단으로부터 적정한 것으로 검토되었는 바,

○ 설계에 반영토록 조치하여 조기개통에 따른 민원 해소 및 강설시 초동제설 작업시행으로 차량 및 주민의 안전사고를 방지코자 함.

붙  임 : 감리검토의견서 각 1부.  끝.