업무연락전
지시번호	SMIH-14-32950	연번(문서번호)	SMIH-14-32950
지시일자		작성일자	2014-07-23
지 시 자	최진우	처리기한
제 목	북단램프구간 우선시공 지시
내 용
1. 20140. 7.22 개최한 기술자문회의와 관련하여 북단IC 일대 D램프 P2, C램프 기보강 구간에 대한 보완설계도서를 송부하오니 시공이 가능한 구간에 대하여 Fast Track방식으로 우선 시공토록 조치하시기 바랍니다. 가. 아울러 감리단은 보완설계도서에 대하여 기술지원감리원등의 검토를 실시하여 2014.7.31까지 실정보고하여 주시기 바랍니다. 2. 월드컵감리 제2014-235(2014.7.21.)호로 제출한 하계휴가에 대하여 승인하니 대직자, 업무인수인계등 감리업무에 철저히 기하기 바랍니다. 3. 아래 미결사항에 대하여 조속히 검토하여 제출하시기 바랍니다. 가. 지장상수도 이설 추가 실정보고 : 2014. 7. 25 나. 매립폐기물 처리 방안 : 2014. 7. 31 다. 6차분 공정추진 및 예산집행 계획 : 2014. 7. 25 라. 난지물재생센터에서 요청한 휀스설치 계획 : 2014. 7. 25
붙임 : 보완설계 도서 1부. 끝.

행정중심복합도시건설청

서울특별시 도시기반시설본부