문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-@N
결재일자
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	관리팀장	북서울꿈의숲관리사무소장	중부공원녹지사업소장
협 조

북서울꿈의숲 족구장 조성 계획

2015. 02.

중부공원녹지사업소

북서울꿈의숲관리사무소

북서울꿈의숲 족구장 조성 계획

북서울꿈의숲 산림지역 내 미사용 운동시설 공간을 족구장으로 새롭게 단장하여 다양한 생활체육 기회를 제공함으로써 공원이용 만족도 향상에 기여하고자 함

■ 추진배경

오용식 국회의원(새정치민주연합, 강북갑)의 미사용 배드민턴장에 대하여 족구장으로 변경 요청

강북구생활체육회장, 강북구 족구연합회장 측에서 성심배드민턴장을 족구장으로 사용할 수 있도록 변경 요청

■ 면담진행

면담요청 : 오영식 국회의원, 새정치민주연합(서울시당위원장, 강북갑)

1차 면담

○ 면담일시 : 2014.11.14.(금) 17:00

○ 참 석 자 : 공원녹지정책과장, 공원관리팀장, 북서울꿈의숲관리사무소장, 의원보좌관 등

○ 면담주제 : 북서울꿈의숲 내 위치한 성심배드민턴장을 족구장으로 변경 가능 여부 등

○ 면담결과

- 기존 배드민턴장을 족구장으로 변경하는 것은 가능함(법률상)

- 기존 배드민턴장을 족구장으로 변경 시 제기 가능 민원의 사전 파악과 주민 협조를 위한 현장 의견 수렴 진행과 족구장으로 변경하기 위한 시설정비 예산 확보 우선

2차 면담

○ 면담일시 : 2014.12.01.(워) 14:40

○ 참 석 자 : 오영식 국회의원, 강북구 구의원 이백균, 김영준, 강북구 생활체육회장 이용구, 강북구 족구연합회장 조휘석, 공원녹지정책과장, 공원관리팀장, 북서울꿈의숲소장, 의원보좌관 등 12명

○ 면담주제 : 북서울꿈의숲 내 성심배드민턴장을 족구장으로 변경하는 세부 사항 논의

○ 면담결과

- 족구장 전용구장 설치에 필요한 야간 조명 시설 및 족구공 막이시설, 소나무 식재, 라인마킹 및 중앙 네트 설치 ⇒ 의원측 요구시설

- 푸른도시국 공원녹지정책과 예산(1억원 미만) 지원 15년도 공사 시행

- 위치는 미활용 성심배드민턴장이나 주변에 위치한 한벗 배드민턴장 등 적지 선정하여 족구장 설치 ⇒ 족구연합회에서 원하는 장소로 선정

- 강북구 생활체육회장 및 족구연합회장의 책임하에 기존 배드민턴 회원들의 반발이 없도록 사전 조치 ⇒ 기존 배드민턴 회원들이 민원을 제기하지 않겠다는 각서 제출 조치

■ 사업개요

위    치 : 북서울꿈의숲 북측 산림내(성심배드민턴장)

대상규모 : 561㎡(배드민턴장 3면)

소요예산 : 100,000천원(공원녹지정책과 예산 지원)

사업내용 : 족구장 1면 및 야간조명 설치

사업기간 : 2015. 1. ~ 6.

- 2015. 1. : 배드민턴협회 및 족구협회 협의

- 2015. 2. ~ 3. : 실시설계(족구장협회 설명회) 및 공사발주

- 2015. 4. ~ 6. : 공사시행 및 준공

■ 현안사항

족구장 조성 관련 예산이 미확보된 관계로 푸른도시국 공원녹지정책과 예산 지원 필요 ⇒ 100백만원

공원 운동시설 종류 변경(배드민턴장⇒족구장) 관련 공원조성계획결정(변경) 시행

■ 기대효과

현재 사용하지 않는 운동시설을 시민이 요구하는 시설로 새 단장하여 다양한 생활체육 기회 제공 및 공원이용 활성화에 기여

붙임 : 1. 위치도 및 현황사진 1부.

2. 강북구생활체육회 협조 요청 공문. 1부.

3. 국민생활체육강북구배드민턴연합회 협조 요청 공문. 1부. 끝.