서울무형문화재 북촌교육전시장 정밀안전진단 용역

과 업 지 시 서(안)

2019. 9.

문 화 본 부

(역사문화재과)

- 목   차 -

1. 과업개요	1

2. 과업목적	1

3. 과업의 범위	1

4. 과업의 세부내용	2

5. 과업수행단계	4

6. 과업수행 일반지침	6

7. 과업수행시 안전조치	7

8. 보안대책	8

9. 성과품 제출	9

10. 특기사항	9

서울무형문화재 북촌교육전시장 정밀안전진단 용역

과 업 지 시 서(안)

1. 과업개요

○ 과 업 명 : 서울무형문화재 북촌교육전시장 정밀안전진단 용역

○ 발주기관 : 서울특별시 문화본부 역사문화재과

○ 과업기간 : 착수일로부터 100일

○ 사업예산 : 40,300,000원(부가세 포함)

2. 과업목적

○ 서울무형문화재 북촌 교육전시장에서 발생한 내외 벽면·목재 균열 및 서까래·마루 벌어짐 현상 등이 발생함에 따라,

○ 대상 시설물의 현 상태, 물리적·기능적 결함, 구조적 안전성 등을 정확하게 진단하여 현재 발생한 상황의 원인을 파악하고, 이에 대한 적절한 보수·보강방법의 기본 방향을 제시하는 등 지속적인 유지관리에 필요한 방안을 수립하고자 함

3. 과업의 범위

○ 공간적 범위 : 서울무형문화재 북촌 교육전시장(종로구 북촌로 20-13)

○ 내용적 범위

- 자료수집 및 분석

- 현장조사 및 시험

- 상태평가

- 안전성평가

- 종합평가

- 보수·보강 방법 제시

- 종합보고서 작성

4. 과업의 세부 내용

□ 자료수집 및 분석

○ 시설물 개요

○ 시설물의 과거 재해 및 보수‧보강 이력 등 관련자료 검토

○ 진단의 범위 및 내용 검토

○ 주변 환경 현황분석

○ 유사 문화재와의 비교

○ 기타 시설물 현장조사에 필요한 사항 파악

□ 현장조사 및 시험

○ 전체부재의 외관 조사

- 시설물 제원의 확인

- 벽면·목재 균열 및 서까래·마루 벌어짐, 기둥 기울음 등 상태 확인

○ 주요 부재별 상태평가

○ 하중 조사

- 구조부재의 연결 상태 조사

- 주요 구조부의 현황 파악

- 상부 구조물의 하중 조건 파악 및 하중 전달체계 파악

○ 변위‧변형조사

- 수직‧수평 구간별 형태적 변형 특성 분석

- 축부재의 기울기 분석

- 수평부재의 처짐 및 휨 분석

- 모니터링을 위한 사전 준비 : 측량점, 온습도 측정 위치, 주요 부재의 변형 상태 측정 부분 등

○ 성능저하부 조사

- 구조체의 단위부재별 상태

- 재료‧구조‧환경적 영향 요인 분석

○ 초석강도 조사

○ 비파괴조사

- 목재 함수율 측정

- 목재 수종감정

- 목재 부후검사 : 부재 내부의 전반적인 열화상태 파악 및 동공, 부후, 충해와 같은 결함 존재 여부와 위치, 크기 확인

□ 상태평가

○ 외관조사 결과분석

○ 훼손지도 및 현황표 작성

○ 주요 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가에 대한 소견

□ 안전성평가

○ 조사, 시험, 측정 결과를 통한 결함 발생원인 분석

○ 전체 가구의 하중전달체계와 구조시스템 분석

○ 내하력 및 구조 안전성평가 검토

- 외력에 의한 구조체의 기본적 거동과 주요 구조부재에 발생하는 힘의 흐름 파악 및 주요 부재의 부재력과 비교하여 구조적 안전성 검토

○ 축력, 전단력, 휨모멘트 등 부재력 검토

○ 구조해석 및 검토

- 구조물의 3차원 모델링 및 부재의 단면력 검토

○ 시설물의 안전성평가 검토 결과에 대한 소견

□ 종합평가

○ 시설물의 안전상태 종합평가 결과에 대한 소견

○ 안전등급 지정

□ 보수·보강방법 제시

○ 적정한 보수, 보강대책 및 향후 유지·관리 방안 수립

○ 공법 비교안 검토

□ 종합보고서 작성

○ 육안조사 및 상태평가 등에 관한 종합적인 검토, 분석결과 수록

○ 도면 작성 등 보고서 작성

5. 과업수행단계

1) 주요업무의 사전승인 등

(1) 과업수행자는 다음사항에 대해서 사전에 발주기관과 협의하여 과업을 수행하여야 한다.

- 과업수행 계획서 및 착수보고서의 내용변경

- 기본계획을 포함한 주요내용 및 방침의 설정 또는 변경

- 기타 발주기관의 지시나 과업수행자의 판단에 따라 승인받아야 할 사항

2) 과업수행 방법

(1) 본 과업의 수행은 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제13조 및 동법 시행령 제13조 규정에 의한 안전점검 및 정밀안전진단 지침 및 세부지침에 준하여 실시하여야 한다.

(2) 과업수행자는 과업지시서와 관련법령 및 제규정 등에 따라 성실하게 과업을 수행하여야 한다.

(3) 용역수행 처리절차는 본 과업지시서에 따르고 과업지시서에 명시되지 않은 사항에 대해서는 발주기관과 협의하여 처리함으로써 내실 있는 정밀안전진단이 되도록 하여야 한다.

3) 과업착수 보고

(1) 과업수행자는 계약문서에 정하는 바에 따라 용역을 착수하여야 하며 착수 시 관련법령에서 정한 서류 및 다음 각 호의 사항이 포함된 착수보고서를 발주기관에 제출하여야 한다.

- 착수보고서

- 현장대리인계(이력서, 재직증명서, 기술자 면허수첩 및 정밀안전진단 교육이수증서 사본 첨부)

- 참여기술자명단(이력서, 기술자 면허수첩 및 정밀안전진단 교육이수증서 사본 첨부)

- 예정공정표

- 참여기술자의 보안대책 및 보안각서

- 기타 계약담당공무원 또는 법령이나 용역과업에서 제출하도록 한 사항

4) 과업수행 계획서 제출

(1) 과업수행자는 계약 후 10일 이내에 과업수행계획서를 작성하여 발주기관의 승인을 받아야 하며, 이에 포함될 내용은 다음과 같다.

- 대상시설물의 결함상황, 결함정도 및 결함원인을 파악하기 위한 구조 부위별 전반적인 조사항목(시설물의 품질상태, 내구성 조사 등) 결정 및 구체적인 조사방법, 조사 일정계획서 작성, 분석 및 평가방법 제시

- 과업의 단계별 성과품 제출계획서

- 과업수행조직 및 인력(장비) 투입계획서

- 조사대상 건축물별 시험 실시 위치, 시험항목 및 수량계획

- 기술용역 예정공정표, 세부공정 및 장비투입 계획서, 안전관리계획서

5) 업무협의 및 공정보고

(1) 과업수행자는 본 과업 착수 후 수행일정계획에 따라 아래사항이 포함된 공정보고서를 작성·제출하여야 하며, 발주기관의 요구가 있을 때에는 과업진행상황을 별도로 보고하여야 한다.

- 과업 추진내용 및 공정 현황, 투입 인원 및 장비 현황

- 과업수행상 중요 문제점 및 대책, 다음주 과업수행계획

► 설계도서(구조도면, 구조설계서 등) 검토사항을 제출하여 보수･보강 방안 제시 등 건물 활용에 필요한 제반사항을 발주기관과 업무협의 한다.

► 과업수행 중에 용역 수행을 위한 자료수집 및 진행사항에 대하여 관련 부서와 협의하여야 함

(2) 주간 공정보고

과업수행자는 과업착수와 동시에 작업일지를 작성하여 매주 월요일에 제출하여야 하며, 인원투입실적 및 그 주의 인원투입계획 등을 작성･제출하여야 한다. 다만, 실행공정이 계획공정 대비 90% 미만인 경우에는 발주기관에 즉시 보고하고 대책을 수립･제출하여야 한다.

(3) 수시보고 : 발주기관의 요청이 있거나 주요 결정사항이 필요한 경우

(4) 단계별 보고회

과업수행자는 용역 진행 단계별로 다음 보고회를 개최하여야 한다.

- 착수보고회 : 착수일로부터 7일 이내

- 최종보고회 : 준공 7일 전

6) 용역자문

(1) 용역자문

- 과업수행자는 과업내용을 용역수행 진도에 따라 2～3단계(조사 및 시험 결과 분석 후, 종합평가 및 등급 선정 후, 보수･보강방안 선정 후 등)로 구분하여 외부 전문가 자문회의를 실시하여야 하며, 지적사항은 검토 후 조치계획서를 작성하여 과업수행자와 협의 후 보완하여 제출하여야 한다.

(2) 용역자문 결과의 반영

- 과업수행자는 용역자문 시 지적사항에 대하여 면밀히 분석･검토하여 발주기관에 조치계획을 보고한 후 특별한 사유가 없는 한 그 결과를 용역에 반영하여야 한다.

6. 과업수행 일반지침

1) 본 과업은 계약체결 즉시 착수하여야 하며, 착수 전 본 과업내용서에 근거한 세부과업수행 계획서를 작성 제출하여 서울시의 승인을 받아야 한다.

2) 과업수행계획서에는 현장대리인계, 과업참여자의 분야별 명단, 보안각서 등 과업수행에 필요한 제반서류를 첨부하여 제출하고 과업착수 시에는 착공계를 제출하여야 한다.

3) 과업참여자의 변경 시에는 서울시와 협의하여 정하도록 한다.

4) 과업의 원활한 수행을 위하여 과업단계별 분야별 전문가로 구성된 자문위원회 또는 관련기관 협의회를 구성 운영할 수 있으며 과업내용과 관련된 각계 전문가의 의견을 광범위하게 수렴하여야 한다.

5) 과업수행계획서에 따라 실시하는 중간보고 및 최종보고는 책임기술자가 보고하고, 기본계획 범위결정, 부분별 계획 등 과업수행 단계별 기본방향과 계획내용에 대하여 발주자(서울시), 전문가로 구성된 자문회의를 개최하여 과업의 방향, 내용 등에 대한수정, 보완, 의견제시 등으로 과업의 질을 높이고 원활한 과업수행을 도모하며, 세부추진일정 및 추진내용 등에 대하여 업무담당자와 사전에 긴밀히 협의한 후 수정하여야 한다.

6) 본 과업내용서에 규정되지 아니한 사항은 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」, 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침」, 「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」,「콘크리트 구조기준」, 「콘크리트 표준시방서」,「하수도 시설기준」, 「상수도 시설기준」 등 제반 규정 및 지침을 준수해야 한다.

7) 과업수행 중 여건변동 등으로 변경이 있을 때에는 서울시와 협의하여야 하며, 과업범위 또는 내용의 변경, 기타 서울시가 필요하다고 인정할 때에는 설계변경할 수 있다.

8) 본 과업완료 후에도 경미한 추가 작업은 수급인 부담으로 과업성과를 신속히 보완·제출하여야 한다.

9) 본 과업은 예정공정표와 대비하여 매월 말 진도를 익월 10일까지 보고하여야 한다.

10) 서울시는 본 과업 수행에 부적격하다고 판단되는 과업참여자에 대하여 책임연구원에게 교체를 요구할 수 있으며 책임연구원은 요구받은 즉시 과업참여자를 교체하여야 한다.

11) 최종보고서는 인쇄 전 그 내용에 대하여 서울시와 협의하여야 한다.

12) 각종 보고서의 내용은 중간평가·보고회 등 검토 가능한 수준이어야 하며, 수급인이 파워포인트를 제작하여 필요한 자료를 작성·제출하여야 한다.

13) 본 과업내용서 해석에 의견차가 있을 때에는 쌍방 협의에 따른다.

7. 과업수행시 안전조치

1) 현장 본조사를 시행하기 전에 과업수행에 투입되는 모든 기술자는 과업수행 전에 일일안전교육을 철저히 시행하고, 현장 출입시 안전모, 안전화 등 안전장비를 착용하여야 하며, 안전사고나 화재예방에 만전을 기해야 한다.

2) 위험한 작업시에는 안전관리자가 입회하도록 하며, 특별교육을 실시한다.

3) 작업실시 전에 지장물의 파악을 위하여 관리주체의 협조를 얻어 안전조치를 취한 후 작업을 실시한다.

4) 공공의 안전과 관계가 있는 경우에는 적절한 조치(출입금자, 접근금지 등의 표지판 설치, 감시인 배치 등)를 한다.

5) 안전관리자는 위험물 저장소, 통제구역 등의 출입에 대하여는 관리주체와 사전협의를 하며, 관리주체가 위 장소의 사용자에게 작업 사실을 공지할 수 있도록 사전 협조를 한다.

6) 아래 내용에 해당되는 작업시에는 반드시 보호구를 착용한다.

- 높이 2m 이상의 고소작업으로 추락위험이 있는 장소에서는 안전벨트를 착용한다.

- 항시 안전모 및 안전화를 착용한다.

- 분진 등이 현저하게 발생되는 장소에서는 분진 방지 마스크를 착용한다.

- 유해가스 등에 의한 질식 등의 위험이 있는 장소에서는 방독 마스크 또는 방독면을 착용한다.

- 산소 결핍 등의 위험이 있는 장소에서는 송기 또는 산소마스크를 착용한다.

- 현저한 소음이 발생되는 작업 장소에서는 귀마개를 착용한다.

- 그라인더 작업 등 비산물에 의한 위험이 있는 작업시에는 보안경 또는 보안면을 착용한다.

- 기타 위험 요소가 있는 장소에서의 작업시에는 적절한 보호용구를 사용한다.

7) 야간 또는 어두운 곳에서의 작업시에는 충분한 밝기의 조명시설을 갖추고 식별이 용이하도록 조치를 하며 수시로 작업자 상호간에 연락을 취한다.

8) 산소 결핍이 예상되는 장소는 작업 전에 반드시 산소 농도를 측정하고 적절한 조치를 취한다.

9) 유해가스 발생 및 잔류가 예상되는 장소는 반드시 사전에 정밀 측정기에 의한 측정, 확인 및 안전조치를 한 후에 작업한다.

10) 전기를 사용할 경우에는 현장 내 전기담당자와 협의하여 감전사고 예방조치를 취한다.

11) 각종 측정장비의 사용시 주의사항을 숙지하여야 하며 무리한 사용과 조작을 하지 않는다.

12) 장비 사용에 있어 취급자격이 요구되는 장비는 유자격자 이외에는 사용할 수 없도록 한다.

13) 안전사고 방지를 위하여 안전간판, 경광등 및 관련 안전조치 시설물의 설치와 안전요원을 위험이 예상되는 구간에 배치한다.

8. 보안대책

1) 본 과업의 결정과정에 있는 사항의 보안 관리를 철저히 하여야 한다.

2) 수급인은 보안대책을 수립하여 과업수행 대표자와 종사자 및 관련된 각 개인별 보안각서와 함께 제출하여야 한다.

3) 모든 성과품 및 과업수행과정 자료는 수급인이 소유할 수 없으며 본 과업수행을 위해 필요한 용도 이외의 목적으로 업무담당자의 허가 없이 복사 또는 유출하거나 사용할 수 없다.

4) 과업폐기물은 소각 또는 세단기 처리를 하여야 하며 그 처리내용(일시, 장소, 방법, 처리자) 및 목록을 제출하여야 한다.

5) 과업수행 장소는 필요시 제한구역으로 지정하고 외부인의 출입을 통제하여야 한다.

6) 용역수행 시 작성한 자료와 성과품에 대하여는 업무담당자와 협의하여 내용의 중요성에 따라 대외비 및 일반자료로 분류하여 보관하고, 정·부 책임자를 지정보고 하여야 한다.

7) 용역수행 시 대외비 이상의 자료는 반드시 업무와 직접 관계가 있는 자에 한하여 열람할 수 있도록 하여야 하며, 열람 기록전을 첨부하여야 한다.

8) 과업의 내용상 외부에 유출될 경우 물의를 일으킬 수 있는 성과를 작성 시에는 참여인원은 최소화하고, 업무일지를 비치 작업내용을 기록하여야 한다.

9) 용역수행 과정에서 개최하는 각종 회의 시 본 과업내용이 포함될 경우에는 배포선을 감안하여 필요한 수량만을 생산하고, 회의 종료 후 회수 파기하여야 한다.

10) 대외비 이상으로 분류된 자료 및 성과물을 발간하고자 할 때, 발간업체 관련자의 보안 관리는 과업수행자의 보안관리 기준에 따른다.

11) 과업수행 중 또는 수행 후 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 수급인이 진다.

9. 성과품 제출

○ 종합보고서 : 10부(보수·보강설계, 시공방법, 보강공사비, 사진, 도면 등 포함)

○ 보고서 CD : 5매(종합보고서 수록)

10. 특기사항

- 과업완료 후에도 본 과업과 관련하여 필요시 자문에 응하여야 한다.

- 위 자문과 관련해 준공 전 업무협력 협약서를 제출해야 한다.