건조시설 혼합컨베이어외 4종 분해정비(중지) 계획서

1. 보수목적

• 설비의 고장등 돌발 상황발생에 대비하고자 시설을 사전점검 및 노후부품 등을 교체․정비 함으로써 슬러지 건조시설의 유지관리에 만전을 기하고자 함.

2. 중지(정비보수)사유

• 혼합컨베이어 보수 및 건조기 디스크보완용접, 건조기 AGITATOR교체 등으로 인해 설비의 가동중지가 불가피하며,

• 설비 가동중지시점에 맞추어 건조기, 배가스처리시설, 슬러지이송설비 등 주요설비의 내부상태점검 및 노후부품의 교체․수리를 실시하고자함.

3. 보수일정

• 보수(중지)기간 : ‘14년 1월  8일 00:00 ~‘13년 1월  9일 24:00 (총 48시간)

4. 슬러지처리계획

• 정비(중지)기간 중 탈수슬러지 미처리 예상량 : 약 172톤

슬러지적치장 저장용량	현 재 적치량	일발생량 (12월기준)	슬러지처리량		적 치 가능량
			매립지(12월)	건조처리량
3,500톤	2,900톤	303톤	217톤/일	90톤/일	600톤

• 처리방법 : 오니처리부와 협의하여 발생슬러지를 최대한 반출처리하고, 탈수슬러지

적치장에 임시저장하여 건조시설 재가동 후 반입처리.

5. 주요작업사항

• 외주작업

일 자	보 수 사 항	비 고
□ 건조시설 혼합컨베이어외 4종 분해정비
· 건조기 DISK	․건조기 DISK 보완용접	· 건조슬러지와 DISK의 마찰로 인 한 마모발생(STEAM LEAK)
· 탈수슬러지 배출컨베이어	․구동 샤프트#B, 슬리브,베어링 교체	· 구동축 파손으로 인한 소모부품 교체
· 건조기 AGITATOR	․건조기내 AGITATOR 교체	․건조기내 마찰에 의한 소모성부품 으로 건조슬러지의 원활한 배출을 위함
· 혼합컨베이어	․혼합컨베이어 패들 전량교체	· 건조 및 탈수슬러지 혼합과정에서 마모와 파손으로 주기적인 교체 필요
· 탈수슬러지 배출컨베이어 모타감속기	․모타감속기#B 교체	· 저장조에서 슬러지이송효율 저하로 처리량감소 발생

•자체작업

일 자	보 수 사 항	비 고
1월 8일	건조기 점검구 취외 및 슬러지제거
	건조기 순환이송컨베이어#1 패킹교체
	건조기 두께측정 및 용접부분 Check
	슬러지 압송피더 내부점검 및 청소
	건조배가스배관 개공작업
	건조슬러지 이송콘베이어 점검(배출,냉각,순환,수직이송)
	보일러 풍압 센서점검
	건조기 KNIFE 및 이송기 점검(풀림,마모)교체
	건조슬러지 저장조 내부 및 레벨센서 점검
	원격배출기 흡입배관 개공작업
	오토스트레이너 필터 청소
1월 9일	각 설비 감속기 Oil 교체
	여과집진기 내부점검
	각 송풍기 및 감속기 커플링 점검 및 주유
	집수정 피트점검 및 청소
	응축수 탱크 및 부대기기 점검
	열교환기 세척수필터 청소
	벤츄리스크러버 내부점검 및 노즐청소
	세정집진기 내부점검 및 노즐, 데미스터 청소
	각 설비 보수상태 점검 및 시운전
	현장 정리정돈 및 청소작업
	가동개시

6. 안전교육 및 안전관리

• 안전관리계획을 수립후 사전에 보수 및 점검에 참여하는 외부 및 내부자에 대한     안전관리 교육을 실시하고, 작업시는 안전장구를 반드시 착용토록 조치

가. 기계 & 기본 안전부분 안전교육 내용

- 회전체 주의 및 근무복장 단정, S/W OFF 후 작업중 표찰 부착

- 고온 작업시 화상주의 보호장구 착용

- 안전 보호구 착용〔 안전벨트 및 안전화, 안전모 〕

- 추락 및 협착 주의사항〔 고층 작업시 안전벨트 착용, 안전거리 유지 〕

- 작업중 및 보행시 바른보행 실시〔 설비 돌출부위 및 계단 통행시 주의사항 〕

- 현장내 흡연금지

나. 전기 & 가스 부분 안전교육

- 각 작업시 스위치 S/W 조작시 Off 확인후 작업실시하며 팀리더 지시에따름

〔 상호간 의사소통 원활 〕

- 용접기 사용시 케이블 피복손상부 점검 및 Holder 상태 확인후 S/W 조작

- 가스 및 산소 취급시 밸브 Open / Close 상태 확인 철저

- 불티 비산방지 조치, 소화기 현장 비치

※ 보수 작업시 각 조 팀 리더가 조원들의 안전관리 책임자로 임명되어 안전관리에 만전을 기함.

7. 건조시설 혼합컨베이어외 4종 분해정비  일정표

일 정 작 업 명	08일(수)		09일(목)
	00:00~08:00	08:00~24:00	08:00~18:00	18:00~24:00
외 주 작 업
건조기 디스크 보완용접
탈수슬러지 배출컨베이어 구동샤프트 등 교체
건조기 AGITATOR 교체
혼합컨베이어 패들교체
탈수슬러지 배출컨베이어 모터감속기교체
자 체 작 업
건조기 점검구 취외 및 슬러지제거
건조기 순환이송컨베이어#1 패킹교체
건조기 두께측정 및 용접부분 Check
슬러지 압송피더 내부점검 및 청소
건조배가스배관 개공작업
건조슬러지 이송콘베이어 점검(배출,냉각,순환,수직이송)
보일러 풍압 센서점검
건조기 KNIFE 및 이송기 점검(풀림,마모)교체
건조슬러지 저장조 내부 및 레벨센서 점검
원격배출기 흡입배관 개공작업
오토스트레이너 필터 청소
각 설비 감속기 Oil 교체
여과집진기 내부점검
각 송풍기 및 감속기 커플링 점검 및 주유
집수정 피트점검 및 청소
응축수 탱크 및 부대기기 점검
열교환기 세척수필터 청소
벤츄리스크러버 내부점검 및 노즐청소
세정집진기 내부점검 및 노즐, 데미스터 청소
각 설비 보수상태 점검 및 시운전
현장 정리정돈 및 청소작업
가동개시