(불광)전광판 (야간)철거 및 기초 공사 계획서

□ 공사 목적

시민들의 건강을 위한 환경개선으로 현재 내구연한이 경과된 은평구 불광역의        대기환경정보전광판 교체 설치 실시

□ 공사 개요

- 일시 : 2016.09.02(금) 20:00 ~ 09.03(토) 10:00                                           (필요시, 익일 00시~08시 작업 연장 시행)

- 장소 : 우리은행 불광동지점 앞 인도 측 (서울특별시 은평구 통일로 713)

- 인원 : 8명 내외(책임자, 철거작업 2명, 기초작업 3명, 차량유도작업 등 2명)

- 현장감독 및 안전점검 : 보건환경연구원 대기측정관리팀 직원 4명

- 투입장비

구분	카고크레인(5톤)	덤프트럭(5톤)	굴삭기	레미콘
대수	1	1	1	1

□ 작업 일정표 : 2016.09.02.(금) 20:00 ~ 09.03(토) 10:00

구분	시간	주요 내용	비고
1	09.02(금) 20:00 ~ 24:00	1. 안전관리 교육내용 점검 2. 도로교통제한을 위한 표지판 및 작업자의 안전화, 안전모, 안전벨트, 야간형광 조끼, 현장 써치조명 등 안전용구 점검 3. 공사장에 필요한 구급약 확인 4. 공사장주변 구조물 보호시설 설치 점검 (콘크리트 타설 후 양생기간 동안의 보행자 안전시설물 등) 5. 토사붕괴 및 지반함몰(싱크홀), 구조물의 파손, 기타 일어날 수 있는 제반사항 재확인 및 점검 6. 작업자 인원 및 장비 확인 등 ※ 야간 작업으로 안전을 최우선으로 현장감독 수행
2	09.03(토) ~ 02:00	안전교육 및 장비 안착(배치)
3	~ 08:00	철거 및 굴착/기초 공사
4	~ 09:00	중간 점검 및 휴식	레미콘 투입 준비
5	~ 10:00	콘크리트 타설 작업

□ 주요 연락처 : 기관별/담당자별

성명	소속	연락처
권명희 주무관	서울시보건환경연구원(감독관)	*************
이능수 주무관	은평구청(보도관리팀)	02-351-7937
전종필 주무관	은평경찰서(교통안전계)	02-350-1352
유건열 차장	관리청 포장(동원포장)	02-3159-7342
옥태홍 현장소장	㈜다호기술(현장대리인)	051-758-3151

붙임 현장 위치도 2부. 끝.

□ 현장위치도