동부간선도로 지하화 사업 추진현황

□ 사업개요

구 분	민자사업	재정사업
구 간	영동대로(경기고앞) ~ 동부간선도로(월릉교)	동부간선도로(송정동 ~ 당현4교) 영동대로 (학여울역 ~ 경기고앞)
규 모	터널 4차로(병렬), 10.1km	터널 4~6차로(병렬), 11.3km 터널 4차로(병렬), 2,4km
추정사업비	9,261억원	19,840억원
개통예상연도	2027년	2028년

□ 추진현황

【 민자사업 】

○ ’15.08.18	: 민간투자사업 제안 (제안사→서울시)

○ ’18.07~΄19.07	: 민자적격성 조사 완료 (PIMAC)

○ ’19.11.27	: 서울시 재정계획심의 위원회 심의 완료

○ ’19.12.10	: 기재부 민간투자사업심의 위원회 심의 완료

○ ’19.12.20	: 시의회 동의

○ ’19.12.26	: 제3자 제안공고 (서공고 제2019-3021호)

○ ’20.07.31	: 우선협상대상자 선정 (대우건설컨소시엄)

○ ’21.1. 현재	: 실시협약 협상 중

【 재정사업 】

○ ’14.06.29	: 도로정비기본계획 수립

○ ’15.11.~΄18.10.	: 타당성조사 및 기본계획용역 시행 (서울시)

○ ’18.08.20	: 타당성조사 의뢰 (서울시→LIMAC)

○ ’19.12.24	: 타당성조사 완료 (LIMAC)

○ ’20.04.27	: 투자심사 완료 (서울시)

○ ’20.07.29	: 기본설계용역 추진계획 수립

○ ’20.10.16	: 기본설계용역 착수

○ ’21.1. 현재	: 공구별 타당성조사 대안 검토 및 교통분석 중

□ 향후 계획

【 민자사업 】

○ ’21.07.	: 실시협약 체결 및 사업시행자 지정

○ ’22.하반기	: 공사 착공(~ ’27.하반기, 60개월)

【 재정사업 】

○ ’21.12.	: 기본설계 완료

○ ’22.∼’23.	: 실시설계 시행

○ ’24.상반기	: 공사 착공

※ 향후 계획은 우리시 재정여건 및 민자사업 추진일정 등에 따라 변경될 수 있음.

노원구 구간 사업개요 및 추진현황

□ 사업개요

○ 위      치 : 노원구 공릉동(월릉교) ~ 하계동(당현4교)

○ 규      모 : 터널 왕복6차로(병렬), 2.7km

○ 추정사업비 : 약 4,630억원(재정사업)

□ 추진현황

○ ’20.07.29	: 기본설계용역 추진계획 수립

○ ’20.10.16	: 기본설계용역 착수

○ ’21.1. 현재	: 타당성조사 대안 검토 및 교통분석 중

□ 향후 계획

○ ’21.12.	: 기본설계 완료

○ ’22.01.∼12.	: 실시설계 시행

○ ’24.상반기	: 공사 착공

※ 향후 계획은 우리시 재정여건 및 민자사업 추진일정 등에 따라 변경될 수 있음.

□ 녹천교 및 창동교 인근 진출로 변경 사업 현황

○ 당초 계획된 당현4교 인근에서 진출입 계획을 수립 중에 있음.

□ 위 치 도