「천개의 숲」

2016년 조성 현황(동부공원녹지사업소)

□ 천개의 숲 : 계획 3개소 / 실적 3개소

연번	사 업 명	위 치	면적 (㎡)	사업비 (백만원)	예산 구분	조성시기
1	H2빌 녹색자금 사업 (기타)	서울시 강서구	1,060 (신규)	120	국비	16.11
2	시립게스트하우스 녹색자금 사업(기타)	서울시 성동구	2,642 (신규)	100	국비	16.11
3	새생명의집 녹색 자금 사업 (기타)	경기도 이천시 모가면 공원로 288-70	800 (신규)	100	국비	16.11

H2빌 녹색자금 사업

□ 사업개요

○ 목    적 : 복지시설 이용자들을 위한 녹색공간 조성

○ 사업기간 : 2016. 3 ~ 2016. 11

○ 위    치 : 서울시 강서구 금낭화로 26가길 130

○ 사 업 비 : 120백만원(국비)

○ 사업규모 : 1,060㎡

○ 사업내용

- 식  재  공  사 : 교목(산딸나무 등 13종) 164주

관목(수수꽃다리 등 9종) 1,760주

초화류(벌개미취 등 13종) 1,350본

- 시 설 물 공 사 : 파고라 등 12종

- 포  장  공  사 : 마사토포장 등 5종

□ 추진현황

○ 2016. 3.28 : 녹색자금 복지시설 나눔숲 조성사업 추진계획시달

○ 2016. 4.22~6.20 : 실시설계용역 시행

○ 2016. 8.25~11.7 : 공사시행

○ 2016. 12.13 : 시설물 인수인계

□ 향후계획

○ 2018.11월까지 시설물 하자검사 지원(매년 상반기 및 하반기)

붙  임 : 준공사진 1부.

□ 준공사진

조성 전	조성 후
조성 전	조성 후
조성 전	조성 후

사업명 : 시립게스트하우스 녹색자금 사업

□ 사업개요

○ 목    적 : 복지시설 이용자들을 위한 녹색공간 조성

○ 사업기간 : 2016. 3 ~ 2016. 11

○ 위    치 : 서울시 성동구 가람길 125

○ 사 업 비 : 100백만원(국비)

○ 사업규모 : 2,642㎡

○ 사업내용

- 식  재  공  사 : 교목(측백나무 등 7종) 62주

관목(공작단풍 등 10종) 2,087주

초화류(맥문동 등 4종) 550본

- 시 설 물 공 사 : 파고라 등 12종

- 포  장  공  사 : 투수블럭포장 등 3종

□ 추진현황

○ 2016. 3.28 : 녹색자금 복지시설 나눔숲 조성사업 추진계획시달

○ 2016. 4.20~6.18 : 실시설계용역 시행

○ 2016. 8.26~11.3 : 공사시행

○ 2016. 12.28 : 시설물 인수인계

□ 향후계획

○ 2018.11월까지 시설물 하자검사 지원(매년 상반기 및 하반기)

붙  임 : 준공사진 1부.

□ 준공사진

조성 전	조성 후
조성 전	조성 후
조성 전	조성 후

사업명 : 새생명의집 녹색자금사업

□ 사업개요

○ 목    적 : 복지시설 이용자들을 위한 녹색공간 조성

○ 사업기간 : 2016. 3 ~ 2016. 11

○ 위    치 : 이천시 모가면 공원로 288-70

○ 사 업 비 : 100백만원(국비)

○ 사업규모 : 800㎡

○ 사업내용

- 식  재  공  사 : 교목(왕벚나무 등 9종) 68주

관목(사철나무 등 7종) 1,724주

초화류(꽃무릇 등 4종) 2,030본

- 시 설 물 공 사 : 경사데크 등 9종

- 포  장  공  사 : 마사토포장 등 2종

- 우배수공사 : 집수정 등 5종

□ 추진현황

○ 2016. 3.28 : 녹색자금 복지시설 나눔숲 조성사업 추진계획시달

○ 2016. 4.20~6.18 : 실시설계용역 시행

○ 2016. 8.26~11.3 : 공사시행

○ 2016. 12.14 : 시설물 인수인계

□ 향후계획

○ 2018.11월까지 시설물 하자검사 지원(매년 상반기 및 하반기)

붙  임 : 준공사진 1부.

□ 준공사진

조성 전	조성 후
조성 전	조성 후
조성 전	조성 후

「천개의 정원」

2016년 조성 현황(동부공원녹지사업소)

□ 천개의 정원 : 계획 1개소 / 실적 1개소

연번	사 업 명	위 치	면적 (㎡)	사업비 (백만원)	예산 구분	조성(예정)시기
1	개포디지털혁신파크 (옥상녹화·텃밭조성)	서울시 강남구 개포로 416	668 (신규)	234	시비	16.11

개포디지털혁신파크 옥상녹화 텃밭조성 사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 서울시 강남구 개포로 416

○ 사업기간 : 2016. 2. ~ 10.

○ 사 업 비 : 234백만원

○ 사업내용

- 식재공사 : 등근소나무 등 45종 8,126주

- 시설물공사 : 파고라, 데크 등 15종

□ 추진현황

○ ‘16.01.26 : 사업 추진계획 시달

○ ‘16.01.27 : 녹화 협약 체결

○ ‘16.02.19~3.19 : 건축물구조 안전진단 용역 시행

○ ‘16.04.11~06.13 : 실시설계용역 시행

○ ‘16.07.26~10.20 : 공사시행

□ 향후계획

○ 2018.10월까지 시설물 하자검사 지원(매년 상반기 및 하반기)

붙  임 : 준공사진 1부.

□ 준공사진

조성 전	조성 후
조성 전	조성 후
조성 전	조성 후