계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 양방향 전기집진기 시범설치공사(1공구)

□ 공사개요

위 치	서울지하철 5호선 본선구간 9개소
개 요	○ 양방향 전기집진기 설치공사 - 급수배관 설치공사, 동파방지열선 설치공사, 자동제어시스템 구축공사, 블라스트댐퍼 및 댐퍼제어반 교체공사, 양방향전기집진기 설치공사
기 간	착공일부터 180일

□ 심사결과

◦ 설계금액  : 4,636,824천원

◦ 심사금액  : 4,447,238천원

◦ 절 감 액  :    189,586천원

◦ 절 감 률  :      4.09%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정(조달청 가격정보 등) : 고무발포보온재 등 33종

- 고무발포보온재(D20x50T)/m : 16,880원 → 11,060원(감 5,820원)

- 히팅케이블(16W/m이상, Self Regulater)/m : 15,000원 → 12,000원(감 3,000원)

◦ 일위대가 조정 : 열선조작반 설치 등 12종

- 열선조작반 설치 : 내선전공 0.385  →  기계설비공 0.271인

보통인부   0.135인

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음