계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 남태령역 변전소 소방시설 개량공사

□ 공사개요

위 치	지하철 4호선 남태령역
개 요	○ 청청소화가스설비(HFC-23) 설치 및 소화배관 철거 등 ○ 자동화재탐지설비, 유도등설비, 철거공사 등
기 간	착공일부터 90일(3개월)

□ 심사결과 – 관급자재 및 시설분담금 심사제외

◦ 설계금액  : 445,800천원

◦ 심사금액  : 432,429천원

◦ 절 감 액  :    13,371천원

◦ 절 감 률  :    3.00%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정(조달청 가격정보 등) : 선택밸브 외 15종

- 선택밸브(40A)/개 : 590,000원 → 530,000원 (감 60,000원)

- HFC-23 Nozzle(180º, 32A)/개 : 46,000원 → 42,000원 (감 4,000원)

◦ 일위대가 조정 : 잡철물 제작설치 등 4종

- 잡철물 제작설치(철물)/톤 : 철공 27.65일 → 철판공 27.65인

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음