계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 수서1단지 온도조절기 교체공사

□ 공사개요

위 치	서울특별시 강남구 양재대로55길 10(일원동 수서1단지 아파트)
개 요	수서1단지 임대아파트 2,214세대 온도조절밸브 및 온도조절기 교체
기 간	착공일로부터 ~ 210일

□ 심사결과

(단위 : 천원)

구 분	요청금액	심사금액	절감액	절감율
금 액	764,315	734,252	30,063	3.93%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정

- 유량조절복합밸브(20A, 전동식 정유량기능) : 90,000원/개 → 85,000원/개

- 케이블 (UTP 4P, CAT 5E) 413원/m → 262원/m

- 멀티탭(T형, 3구) : 2,300원/개 → 1,890원/개

- 고황동 : 6,400원/kg → 4,000원/kg

○ 일위대가 조정(수량 조정)

- 메모밸브 : 0.2kg →  0.5kg

- 게이트밸브 : 0.1kg → 0.72kg

□ 사업부서 협의결과

○ 이견 없음