계약심사 조정내역 및 사유서-1

□ 공 사 명 : 광화문 지하보도 에스컬레이터 교체 및 기타공사(4,6번 출구)

□ 공사개요

위 치	광화문 지하보도 4번, 6번 출구
개 요	- 에스컬레이터 2호기 교체(1200평, 스텝식, 층고 6.5m) - 기타 공사(배수 펌프 설치 및 자동제어 제어반 공사)
기 간	착공일로부터 ~ 2020. 12. 31

□ 심사결과

[단위 : 천원]

구 분	요청금액	심사금액	절감액	절감율
금 액	648,032	602,503	45,529	7.03%

□ 주요 심사내용

◦ 원가계산서 제경비 요율 조정

- 산업안전보건관리비 : 1.86%+5,349,000원 → 3.09%

- 건설기계대여대금 지급보증서 발급수수료 : 0.11% → 0.10%

◦ 자재단가 조정 : 스테인레스 강판(STS304 2B×2.5t) 외 8종

- 스테인레스 강판(STS304 2B×2.5t) : 2,998원/kg → 2,850원/kg

- 전선관(16C) : 2,171원/m → 1,580원/m

◦ 일위대가 조정 : 경사부 주행레일 제작 외 12개 공종

- 경사부 주행레일 제작 : 잡철물설치(복잡) → 잡철물설치(보통)

- 전선(HFIX 2.5) : 내선전공 0.01인/m → 0.00081인/m

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음

계약심사 조정내역 및 사유서-2

□ 공 사 명 : 광화문 지하보도 에스컬레이터 교체 및 기타공사(5,7번 출구)

□ 공사개요

위 치	광화문 지하보도 5번, 7번 출구
개 요	- 에스컬레이터 2호기 교체(1200평, 스텝식, 층고 6.5m) - 기타 공사(배수 펌프 설치 및 자동제어 제어반 공사)
기 간	착공일로부터 ~ 2020. 12. 31

□ 심사결과

[단위 : 천원]

구 분	요청금액	심사금액	절감액	절감율
금 액	641,685	596,607	45,078	7.02%

□ 주요 심사내용

◦ 원가계산서 제경비 요율 조정

- 산업안전보건관리비 : 1.86%+5,349,000원 → 3.09%

- 건설기계대여대금 지급보증서 발급수수료 : 0.11% → 0.10%

◦ 자재단가 조정 : 스테인레스 강판(STS304 2B×2.5t) 외 8종

- 스테인레스 강판(STS304 2B×2.5t) : 2,998원/kg → 2,850원/kg

- 전선관(16C) : 2,171원/m → 1,580원/m

◦ 일위대가 조정 : 경사부 주행레일 제작 외 11개 공종

- 경사부 주행레일 제작 : 잡철물설치(복잡) → 잡철물설치(보통)

- 전선(HFIX 2.5) : 내선전공 0.01인/m → 0.00081인/m

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음