주요 심사내용

□ 공 사 명: 품질시험소 별관 개보수 공사(기계설비)

□ 사업개요

위 치	서초구 태봉로 108
공사개요	○ 품질시헙소 별관 개보수 설비공사 - 장비설치공사, 위생기구설치공사, 급수급탕배관공사, 오배수배관공사, 철거공사 등
공사기간	착공일로부터 2020년 4월

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	93,979	천원
◦ 심사금액:	76,956	천원
◦ 절 감 액:	17,023	천원
◦ 절 감 률:	18.11	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: 배수펌프 등 37종

- 배수펌프(150LPM×10M×0.75KW)/대: 840,000원 → 650,000원(감190,000원)

- 전기온수기(15LIT)/대: 280,000원 → 252,000원(감28,000원) 등

◦ 일위대가 조정: 감압변장치 등 9종

- 감압변장치(D40×40×40): 배관공 4.02 → 0.579,
보통인부 0.629 → 0.076(서울형품셈)

- 후렉시블덕트호스(D150): 덕트공 0.053 → 0.027 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음