【붙임 2】

기반시설별 실태평가 추진현황

《전석기 의원 / 홍성룡 의원, 도시안전건설위원회》

□ 사업현황

○ 대상시설 및 규모

계	물재생센터	차집관로	비고
개소	4	-
연장(㎞)	-	489

○ 계약기간 : 2018.11.15. ~ 2019.11.15

○ 계 약 자 : ㈜동해종합기숭공사,(주)한국종합기술

○ 예 산 액 :  380백만원

- 집행액 : 152백만원(’19.9월 말 기준)

□ 주요 추진사항

○ ’18.11.15. : 계약 및 착수

○ ’18.12.19. : 착수보고회 개최

○ ’19.1. ~ 4. : 4개 물재생센터 자료 수집

○ ’19.05.31. : 4개물재생센터 상세제원 입력 완료

○ ’19.06.13. : 4개 물재생센터 상세제원 입력자료 안전총괄과 제출

○ ’19.09.30. : 4개물재생센터 실태평가 기초자료 입력 완료

○ ’19. 9월말 기준 공정 :  60%

- 시설물별 정보조사표 7종(기초정보, 기타정보, 상세제원정보, 점검진단정보, 보수보강정보, 성능개선공사정보, 시설물 관리 예산정보) 작성

- 실태평가 보고서 작성 중

□ 향후 계획

○ 2019.10월 : 빅데이터분석 시스템을 통해 하수처리시설 분석 결과 보고

○ 2019.10월 ~ 11월 : 실태평가 보고서 작성

작 성 자	물재생시설과장 : 임춘근 ☎2133-3820	물재생운영팀장 : 송동욱 ☎3830	담당 : 박준현 ☎ 3832